실정보고 검토서

[역사흔적길 석재마감 추가시공, 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '21.01.08. ~ '22.10.31. · 도 급 비 : 228억원				· 시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 · 감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	역사흔적길 석재마감 추가시공[광화문 감 제2022-572호(2022.09.07.)]
실정보고 사유	역사흔적길 이용시 이용자의 안전사고를 방지하고자 기존 석재에 미끄럼방지 마감(잔다듬)을 추가 시공코자 함.
건설사업관리단 검토의견	이용자의 안전사고 방지를 위해 추가 석재마감 시공을 하는 것은 타당하다고 판단되며, 공사비 또한 적정 산정 됨.
*****	****** *********************************************************************************** ********************************************************* ********* *****************************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리 기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계에 반영하고자 함.
결재	주무관	신경환	공원시설과장	이병호		방재시설부장	09/19
							이동훈
	주무관	김현곤	주무관	김규희