투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 설계변경 계약의뢰[제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사]

우리 본부에서 추진 중인 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사」에 소요되는 관급자재(수배전반, 비상발전기, 계장제어장치)에 대한 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 변경내용

계약번호 (구매관리번호)	계약건명	계약자(대표자)	차수	계약금액(원)
				당초	변경	증·감
*********** *************	*******	**** *****	**	***********	*************	****
			**	**********	*************	*************
*********** *************	********	******* *****	**	**********	************	****
			**	**********	************	*************
*********** *************	*********	******* *****	**	***********	***********	****
			**	**********	***********	**************

2. 변경사유 : 시공가능 여부에 따른 총차 미계약 물량을 1차분으로 반영

3. 납품기한 : 2023.01.16.(변경없음)

4. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정), 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 관급자재 설계변경 검토보고 1부.

2. 건설사업관리단 공문 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	박근형		도로설비과장	문학준		설비부장	09/19
김호성
협조자
시행	설비부-29033	(	2022.09.19	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	2014012315@seoul.go.kr	/	부분공개(6)