문서번호	시설관리과-32249
결재일자	2022. 9. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이규배	오영진	09/20
		조임남
협 조

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

[2022년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)-1회]

2022. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

[2022년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)-1회]

명에 의거 아래 공사에 대하여 설계변경(1회) 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

□ 심의대상

○ 공 사 명: 2022년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)

○ 공사개요: D=15㎜~300㎜, L=1,534m

○ 공사업체: **************

○ 계약기간: 2022. 6. 8. ~ 2023. 6. 30.

○ 계약금액: *********************************

○ 설계변경 사유: 신규공종 발생 및 계약물량 증·감 발생

□ 심의일시 및 장소

○ 2022. 9. 19.(월) 14:00  2층 시설관리과 사무실

□ 심의내용

○ 설계변경의 타당성

○ 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 신규공종 발생: 계량기교체공 등 10개 공종

- 계약물량 증감: 아스팔트 포장절단(200㎜이하, 지세-주택가) 등 48개 공종

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

- 제비율 정상 적용된 붙임 내역서로 심의 완료

□ 심의결과

○ 계약변경 타당

○ 주요 공종 변경사항 타당

○ 세부공종 조정내역 타당

○ 제경비 적용 타당

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

(단위: 원)

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
1차수 계약금액	***********	***********	-
2차수 계약금액	***********	***********	-
총차 계약금액	***********	***********	-	변동없음

□ 조치의견

○ 상기 심의결과에 따라 설계변경을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경(1회) 심의위원회 개최 1부.

2. 설계변경 사전심의요청서 1부.

3. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

4. 변경내역서 1부.

5. 검증확인서 1부.

6. 합의서 1부.  끝.