문서번호	조경과-1165
결재일자	2022. 9. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정원정책팀장	조경과장
성현수	박수미	09/20
		안수연

- 시민정원작가 디딤돌 프로젝트 -

참여팀 예산실행계획 변경 검토보고

2022. 9.

푸른도시여가국

( 조 경 과 )

- 시민정원작가 디딤돌 프로젝트 -

참여팀 예산실행계획 변경 검토보고

「시민정원작가 디딤돌 프로젝트」관련 참여팀의 예산실행계획 변경요청이 자치구로부터 접수되어 다음과 같이 검토보고함.

□ 관련근거

ㅇ「시민정원작가 디딤돌 프로젝트 사업실행계획 변경 승인 재요청」공원녹지과-20226호(2022.9.19.)

□ 변경개요

ㅇ 참여팀명 : 녹녹

ㅇ 총사업비 : 금24,000천원

ㅇ 변경내용 : 예산항목 변경

ㅇ 변경사유 : 자문의견에 의한 계획변경, 현장여건에 따른 금액변경 등

(단위 : 원)
구분		사업비			주요사유
		변경 전	변경 후	증감
총계		24,000,000	24,000,000	-
인건비	소계	6,000,000	-	△6,000,000
	전문인건비	6,000,000	-	△6,000,000	사업진행비로 변경
사업 진행비	소계	17,000,000	21,377,500	4,377,500
	임차비	-	2,255,000	2,255,000	굴삭기 등 장비임차
	식물재료비	4,000,000	3,205,500	△794,500	현장여건 반영
	시설물재료비	10,000,000	12,540,000	2,540,000	현장여건 반영
	용역비	3,000,000	3,377,000	377,000
활동비	소계	1,000,000	748,100	△251,900
	식비	1,000,000	681,400	△318,600
	사무용품 및 경비	-	66,700	66,700
폐기물처리비		-	1,870,000	1,870,000	폐기물 처리비 추가
수수료		-	4,400	4,400	공인인증서 발급수수료

□ 검토결과

구분	검토내용	검토결과
사전승인 사항여부	- 예산항목간 변경 시 자치구와 서울시에 사전 승인 받아야 함(보조금 지침)	해당
사전승인 이행여부	- 자치구에 공문 요청 완료함(붙임1) ※ 자치구 제출일자 : 2022.9.19.	적정
예산변경 적합여부	- 경비 배분의 변경은 보조금 지침 및 기준에 적합 - 자치구 내부 검토 완료(붙임2)	적정
제출서류	- 요청공문(붙임3)	적정

□ 보고자의견

ㅇ 참여팀의 예산변경계획은 적합하여 자치구로 변경승인 통보코자 함.

붙임 1. 자치구 공문 1부.

2. 자치구 내부 검토보고 1부.

3. 참여팀 승인요청공문 1부.  끝.