실정보고 검토서

[가로수 이식 및 수목보호데크 변경, 새로운 광화문광장 조성사업(역사광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(역사광장 및 사직로 선형변경)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '22.01.10. ~ '22.10.09. · 도 급 비 : 117억원				· 시 공 사 : 보훈종합건설㈜ 외 1 · 감 리 단 : ㈜신명건설기술공사 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	*********************************************************
실정보고 사유	- 정부서울청사 주변의 가로수 이식과 관련하여 가로수 내부 부호조사를 실시하여 위험수목은 제거하고 가로수 위치 재조정 - 대경목으로 이식으로 인한 가로수 고사를 방지하고자 전문가 자문을 실시하고, 그 결과를 반영하여 관수 및 약제살포 등을 설계에 반영코자 함. - 정부종합청사 앞 수목보호데크는 연장여건에 맞추어 보행편의와 미관을 고려하여 면적 확대 설치 - 의정부터 수목보호데크는 설계사와 협의를 통해 자전거 도로 포장간섭과 BF관련사항을 반영하여 수정 및 재설치
건설사업관리단 검토의견	- 가로수 생육환경 개선과 보행자의 안전, 편의성 확보를 위해 수목보호데크의 폭을 확장하는 것은 타당하다고 판단됨.
변경(안)	****** ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ********************************************************* ******** ***************************************************************************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계변경 반영하고자 함.
결재	주무관	김현곤	공원시설과장	이병호		방재시설부장	전결 09/21
							이동훈
	주무관	신경환	주무관	김규희