문서번호	급수운영과-32253
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최형석	이연창	성기선	09/21
			신정철
협 조

설계변경 보고서 제출에 따른 검토보고

[월촌초등학교주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사]

2022. 9.

강서수도사업소

[급수운영과]

[월촌초등학교주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사]

설계변경 보고서 제출에 따른 검토보고

『월촌초등학교주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 설계변경 검토보고가 제출되었기에 아래와 같이 검토 후 결과를 보고드림.

※관련대호 서울시설공단 공사감독2처-9897(2022.9.19.)호

2022. 9. 19.

************

□ 공사개요

○ 공 사 명: 월촌초등학교주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사개요: D=100~300mm, L=688m

○ 공사기간: `22. 4. 29. ~ `22. 9. 25.

○ 도 급 비: *************

○ 시 공 사: **************

○ 감 독 자: *****************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 제22조 및 동법 시행령 [제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)]

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4.)

[제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정]

□ 공단 설계변경 심의 현황

구 분	심의요청 사유	심사일자	주요 심사내용(요약)	비고
공단 자체심의	신 규 공 종 및 수량 적정성 심의	‘22.09.16(금)	○ 신규대가 및 수량산출 적정성 확인 ○ 기타 부대공 등 실 투입 수량으로 정산 ○ **************** *****************************

□ 공단 보고내용

○ 설계변경 시행근거

- 공사실정 보고(공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경)

연번	구 분	주요 변경내용	관 련 근 거
1	1차 실정보고	하수박스 하월 및 확폭반영, 인력비조정 도종 변경	강서 급수운영과-30286호 (2022.08.22.)
2	2차 실정보고	S-GATE작업불가로 인한 작업취소	강서 급수운영과-30698호 (2022.08.26.)
3	3차 실정보고	민원으로 인한 녹색매트 변경 설치	강서 급수운영과-31387호 (2022.09.06.)

- 공사 작업지시

연번	구 분	주요 변경내용	관 련 근 거
1	1차 작업지시	S-GATE설치후 단절관 연결 아연도강관을 급수관으로 연결	강서 급수운영과-29107호 (2022.08.02.)

- 제경비 등 실 사용액 정산에 의한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	비고
1	4대보험료 정산 등	건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제부금 정산 하도급발급수수료, 건설기계대여금 정산
2	산업안전보건관리비 정산	실 사용 산업안전보건관리비 적용

○ 주요공정 변경내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감
배급수관 부설	D80~300㎜	m	***	***	증) 33
각종 변류설치	제수밸브실 설치	개소	**	**	감) 1

○ 설계변경으로 인한 계약금액 조정

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공 급 가 액	************	************	**************
	부가가치세	***********	***********	*************
	계	************	************	**************

□ 조치의견

상기 설계변경 건에 대한 서울시설공단 검토내용 및 사업소 추가검토 결과 물량 증감 및 도급액 변경이 타당하다고 판단되므로 설계변경 처리하고자 함.

□ 행정사항

○ 사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 추진

○ 설계변경 내용 서울시설공단에 통보

○ 준공검사원 접수 후 정산처리

붙임  1. 공단 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 등 관련서류 각 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.