실정보고 검토서[노즐 및 낙·출수구커버·

수조 케이블트레이 설치, 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '21.01.08. ~ '22.10.31. · 도 급 비 : 228억원				· 시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 · 감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	노즐 및 낙·출수구 커버, 수조 케이블트레이 설치 [광화문 감 제2022-572호(2022.09.07.)]
실정보고 사유	- 터널분수 출수구 정밀보정을 위한 커버 및 설계에 포함되지 않은 낙수구 덮개 설치 검토 - 한글분수 및 명량분수의 안정적인 운영을 위한 케이블 트레이 설치
건설사업관리단 검토의견	터널분수 커버 및 케이블트레이가 설계 당시 누락된 사항임을 확인하였음(설계자 확인) 이에 현장 반영코자 하며, 공사비 적정 산정 되었음.
변경(안)	****** ******************************************************************************************** ********************************************************* ********* *************************************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리 기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계에 반영하고자 함.
결재	주무관	신경환	공원시설과장	이병호		방재시설부장	09/21
							이동훈
	주무관	김현곤	주무관	김규희