투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	청사 수목 가지치기 설계변경 시행 (계약의뢰)

1. 녹지관리과-24088(2022. 9.16.)「청사 수목 가지치기」와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인「청사 수목 가지치기」와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명: 청사 수목 가지치기

나. 위    치: 한강사업본부 청사

다. 공사내용: 가지치기 2,754주,  황금사철나무 식재 1,400주,

고사목 제거 1,380주, 임목폐기물 처리 4.79톤

라. 공사기간: 2022. 9. 8. ~ 10. 5. (28일간)

마. 도급금액: 금35,892,000원(금삼천오백팔십구만이천원)

바. 도급업체: 주식회사 청호엘에스(대표 송지승)

사. 설계변경 사유: 현장 여건에 따른 식재 물량 증가

아. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		35,892,000	40,043,100	증) 4,151,100
도급비	공급가액	32,629,091	36,402,819	증) 3,773,728
	부가가치세	3,262,909	3,640,281	증) 377,372
	계	35,892,000	40,043,100	증) 4,151,100

자. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 녹지시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(100-401-01)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 변경도면 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	공 원 부 장
주무관	이한솔		녹지관리과장	이무림		공원부장	09/21
김상국
협조자	주무관	이준용		기획예산과장	김영창		총무과장	정현석
시행	녹지관리과-24192	(	2022.09.21	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 녹지관리과 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0845	/전송	02-3780-0745	/	onlhs1001@seoul.go.kr	/	부분공개(5)