문서번호	설비부-29231
결재일자	2022. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
허진		장병선	09/22
			김호성
협 조

『강남순환도시고속도로 8공구 전기공사』

설계변경 자문결과 검토보고(총차14회)

2022. 9.

도시기반시설본부

( 설 비 부)

『강남순환도시고속도로 8공구 전기공사』

설계변경 자문결과 검토보고(총차14회)

우리본부에서 시행중인『강남순환도시고속도로 8공구 전기공사』관련,  유관기관과 협의사항 및 매헌지하차도 주변 최종 교통처리 계획을 반영한 책임건설사업관리단의 설계변경 요청에 대하여 자문결과를 검토하고 보고드림

********************************************************************

***********************************************************

Ⅰ		공사개요

❍ 위    치 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

❍ 공사기간 : 2012.08. ~ 2022.12.

❍ 사 업 비 : ********************************

******************************************************

❍ 규    모 : 연장 3.74km (고가차도 1개소, 지하차도 3개소)

- 고가차도 : 선암교(B: 6차로, L=590m)

- 지하차도 : 매헌 L=900m, 염곡동서 L=640m, 구룡 L=770m

❍ 시 공 사 : ㈜광성기업, ㈜지오 / 감 리 단 : ㈜동명기술공단

❍ 계약현황                                           (단위 : 원)

구분	계약금액	준공(기성)금액	공사기간	비고
총차	*************	*************	*************************
1차	***********	***********	*************************	준공
2차	**********	**********	*************************	준공
3차	*************	*************	*************************	준공
4차	*************		*************************	금차

Ⅱ		설계변경 내용

□ 관련근거

❍ 실정보고 사항 검토보고 (설비부-26476, `22.07.22.)

❍ 제11차 설계변경 자문위원회 결과보고 (설비부-28898, `22.09.15.)

❍ 설계변경 소위원회 자문결과 조치보고 (동기강-2022-271, `22.09.19.)

□ 설계변경 주요내용

1) 과천시청 협의 사항: 양재대로(과천방향) 화훼단지 가로등 설치방식 변경

- 양재대로 과천방향 화훼단지 역U형 볼라드 설치 반대 민원으로 과천방향 화훼단지 가로등은 시설 위치 아닌 기존 위치 등기구만 교체

2) 매헌지하차도 주변 교통처리계획 반영

- 교통섬 9개소 신설, 서울시 디자인 지주 반영 등 교통신호설비 설계내용 반영

□ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 (조건부 가결)

******************************************************************

연번	구 분	조치결과	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영 (C=A-B)
1	******	***** *********************	**********	*	**********
2	******		***********	*********	***********
3	***		**********	************	**********
		*******	***********	************	***********

□ 설계변경 현황

구분	금 액(천원)			비 고
	당초	변경	증,감
총 차	*********	*********	*********	*****
4 차	*********	*********	*********

※ 계약기간 변동 없음

Ⅲ		검토의견 및 향후계획

□ 감리단 검토의견

❍ 설계변경 자문회의(소위원회) 개최 결과에 따른 자문의견을 검토한 결과, 품셈 및 제경비 요율 적용 오류를 수정 적용하여 공사비 감액*************

❍ 변경 설계도서를 검토한 결과 계약금액 조정이 적정한 것으로 판단됨

□ 보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨

❍ 또한 계약금액조정시스템 확인 결과 제경비 적용도 적정하여 총무부에 변경계약을 의뢰코자 함

붙 임 1. 설계변경 자문위원회 결과보고 1부.

2. 자문회의 지적사항 조치결과 및 검토의견서 1부.  끝.