문서번호	시설보수과-25089
결재일자	2022. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	09/22
			김용제
협조

「천왕산생태터널 정밀안전진단 및 개봉교 외 4개소 정밀점검」

용역 추가 과업 실정보고

2022. 9.

강서도로사업소

(시설보수과)

「천왕산생태터널 정밀안전진단 및 개봉교 외 4개소 정밀점검용역」

용역 추가 과업 실정보고

우리 사업소에서 추진중인「천왕산생태터널 정밀안전진단 및 개봉교 외 4개소 정밀안전점검용역」관련, 내진성능평가 추가 과업에 대한 보고 사항 임

1		용역개요

□ 용 역 명 : 천왕산생태터널 정밀안전진단 및 개봉교 외 4개소 정밀점검용역

※ 개봉지하차도, 개화천복개, 오금지하차도, 행주1교, 행주2교, 개봉철도고가

□ 용역기간 : '22. 4. 29.~12. 24.

□ 용 역 비 : 162,658천원

□ 도 급 사 : 백양엔지니어링(주), 대진컨설턴트(주)

2		추진사항

□ ‘22. 4. 29.  : 용역착수(계약 4.14.)

□ ’22. 8. 22.  : 용역 중간보고회 개최   ※ 공정률 65%(9.22 현재)

3		보고내용

□ ************************************************************************

<시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(안전점검의 실시) 3항>

- 관리주체는 「지진ㆍ화산재해대책법」제14조 제1항에 따른 내진설계 대상 시설물 중 내진성능평가를 받지 않은 시설물에 대하여 정밀안전진단을 실시하는 경우에는 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하여 실시하여야 한다

※ 내진설계 대상시설물 : 도로법에 따른 도로시설물(지진․화산재해대책법 제14조)

4		조치사항

□ ***********************

ㅇ ****************************************************************************코자 함.

- 사업비 증/감 현황                                       (단위:천원)

구분	당초	변경	증/감	비 고
용역비	*******	*******	*********	*******

- 예산과목

ㆍ교량안전과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

․ 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비.  끝.