문서번호	시설관리과-35460
결재일자	2022. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김윤빈	유세종	09/23
		代이유찬
협 조

실정보고 검토(혹익사대 배급수관, 4~5차)

실정보고 검토

(홍익사대 배급수관)

2022.  9.

중부수도사업소

(시설관리과)

『홍익사대부속 중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사』

4~5차 실정보고 검토

우리 사업소에서 시행 중인 “홍익사대부속 중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사”와 관련하여 실정보고 검토 및 추가작업 지시 계획에 대한 보고임.

Ⅰ		공사 현황

ㅇ 공 사 명: ************************************

ㅇ 공사위치: *************************

ㅇ 공사규모: 상수관로 부설 D80~150mm, L=898m

ㅇ 공사기간: 2022. 5. 25. ~ 2022. 11. 30.

ㅇ 수 급 인: **************

ㅇ 발 주 처: 중부수도사업소 시설관리과 김윤빈

ㅇ 감 독 처: *****************

ㅇ 공 정 율: 46%**************

Ⅱ		실정보고

□ 1구간(*****************)

□ 굴착심도 및 확폭 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- **********************************************************************************

ㅇ 개략공사비

구분	당초	변경	증감
***	*******	*******	********

□ 철거, 폐쇄 연장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- *****************************************************************************

ㅇ 철거, 폐쇄 변경 현황

구분	구경	철거연장	폐쇄연장
**	******	***	***
**	******	**	***

□ 2구간(*******************)

□ 굴착장비 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- ***************************************************************************************

ㅇ 개략공사비

구분	당초	변경	증감
***	********	********	***********

□ 철거, 폐쇄 연장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- ****************************************************************************

ㅇ 폐쇄 변경 현황

구분	구경	철거연장	폐쇄연장
**	******	****	***
**	******	**	****

□ 인력비율 증가

ㅇ 현황 및 문제점

- *****************************************************************************************************

ㅇ 개략공사비

구분	당초	변경	증감
***	********	********	***********

□ 추가 작업지시 검토

□ 2구간(*******************)

ㅇ 인조잔디매트 설치

- ***********************************************************************************************

ㅇ 개략공사비

구분	공 종	개략공사비	비고
***	************	*******	*

Ⅲ		검토사항

□ 굴착심도 및 확폭 변경 → 적정

ㅇ ************************************

□ 1,2구간 철거, 폐쇄 연장 변경 → 적정

ㅇ ************************************

□ 굴착장비 변경 → 적정

ㅇ ****************************************

□ 인력비율 변경 → 적정

ㅇ ***********************************************

□ 추가작업지시 → 인조잔디매트 설치

ㅇ *************************************************************************************

Ⅳ		조치계획

ㅇ 공단에서 제출한 실정보고서 검토 결과, 타당하다고 판단됨에 따라 향후 설계변경 및 정산 시 반영

연번	구분	개략공사비
1	굴착심도 및 확폭 변경	*******
2	굴착장비 변경	**********
3	인력비율 증가	**********
4	인조잔디매트 설치	**********
계		***********

ㅇ 감독청인 서울시설공단 및 수급인[**************]에 내용 통보

붙임  공사 실정보고 각 1부.  끝.