문서번호	설비부-29297
결재일자	2022. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	09/23
			김호성
협조

\

『로봇과학관 건립 소방공사』

1차 준공검사 결과보고

2022. 9.

도시기반시설본부

(설비부)

『로봇과학관 건립 소방공사』

1차 준공검사 결과보고

우리 본부에서 추진 중인『로봇과학관 건립 소방공사』관련, 건설사업관리단으로부터 1차수 준공검사 결과보고 사항에 대하여 검토하여 보고 드림.

1		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 로봇과학관 건립 소방공사

ㅇ 공사위치 : 도봉구 창동 1-25

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308.39㎡

ㅇ 공사기간 : (총차) '21.07.30.~'23.08.03.

(1차) '21.07.30.~'22.08.24.

ㅇ 계약금액 : (1차) 금25,938,000원 (총차) 금963,909,270원

ㅇ 시 공 사 : (주)선진콘트롤엔엑세스

ㅇ 감 리 사 : (주)종합건축사무소근정 외 1개사

2		관련근거

ㅇ 지방계약법 제17조, 같은법 시행령 64조, 공사계약일반조건 제27조(검사)

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제 10조(발주청의 지도 감독 및 업무범위)

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제 102조(기성·준공 검사자 임명 및 검사기간) 제103조(기성·준공검사 및 재시공)

ㅇ「로봇과학관 건립 소방공사」준공검사(1차) 결과 보고

[KDU(대외) 제22-213호(2022.08.29.)]

3		추진경위

ㅇ 2021.07.30. : 소방공사 착공

ㅇ 2022.06.27. : 소방공사(1차) 공사연기('22.06.30.→'22.08.24.)

ㅇ 2022.08.25. : 소방공사(1차) 준공검사

4		준공검사결과

ㅇ 준공일자 : '22.08.24.(수)

ㅇ 검사일자 : '22.08.25.(목)

ㅇ 검 사 자 : 소방기술지원 건설사업관리기술인 조성철

책임 건설사업관리기술인 임종률

ㅇ 입 회 자 : 공사관리관 김세익

ㅇ 준공검사 요청금액 : 25,938,000원

ㅇ 준공금액

(단위:원)

계약금액(1차)	준공금액(1차)	전회기성	금회기성	누계금액	비 고
25,938,000	25,938,000	-	25,938,000	25,938,000

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	검 사 항 목	검사결과
1	준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지 여부	적합
2	공사시공 시 현장 상주기술인이 비치한 제기록에 대한 검토	적합
3	폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부	적합
4	지급자재의 사용 적부와 잉여장재의 유무 및 그처리의 적정여부	적합
5	제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황	적합
6	건설사업관리기술인의 준공검사원에 대한 검토의견서	적합

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 검토의견

- 로봇과학관 건립 소방공사(장기 1차)의 준공검사를 실시한 결과, 공사 전반에 걸쳐 공사 설계도서 및 기타 약정되로 완료하였고, 시공, 공정 품질, 자재, 안전, 환경 등 공사관리가 전반적으로 양호한 것으로 판단됨.

5		입회결과

ㅇ 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계서 등 관련서류에 따라 준공검사를 실시하였으며, 이상없음을 확인함.

6		조치계획

ㅇ 건설사업관리단에서 실시한 1차수 준공검사 결과 적합한 것으로 확인되어 준공검사 결과를 계약부서에 통보 조치하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 준공검사 결과보고 1부.

2. 공사관리관 입회확인서 1부.  끝.