투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 시행 및 계약의뢰(양화대교남단승강기개선공사)

우리본부에서 시행중인 『양화대교남단 승강기 개선공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 총차 및 1차분에 대하여 아래와 같이 설계변경시행 및 변경계약의뢰하오니 조치바랍니다.

가.용 역 명: 양화대교남단 승강기 개선공사 건설폐기물 처리용역

나.용역기간

- 총차: 2021.8.23.~2022.12.31(1차:2021.8.23~2022.9.30)

다.계약금액

- 총차: 금31,960,600원(1차:금20,000,000원)

라.업체명: (주)건용환경개발

마.변경내역

○ 기간변경

- 총     차: 변경없음

- 1차(당초): 2021.8.21. ~ 2022.9.30.

(변경): 2021.8.21. ~ 2022.12.31.

○ 금액변경

구 분	총 차 금 액(원)	1 차 금 액(원)	비 고
당 초	31,960,600	20,000,000
변 경	35,123,000	35,123,000
증 • 감	3,162,400	15,123,000

○ 수량변경

구 분	단위	총 차 수 량			1 차 수 량
		폐콘크리트	혼합폐기물	임목폐기물	폐콘크리트	혼합폐기물	임목폐기물
당 초	톤	899	23	5	563	14	3
변 경	톤	1,054	16	0	1,054	16	0
증 • 감	톤	155	7	5	491	2	3

바.변경사유: 현장여건에 따른 폐기물 증•감 사항 반영

사.예산과목: 한강접근체계개선(일반회계),양화대교남단승강기개선,시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서(총차) 1부.

3. 변경내역서(1차) 1부.

4. 합의각서 1부.

	기 반 시 설 과 장
주무관	이균휴		기반시설과장	09/26
이병철
협조자	주무관	이준용		기획예산과장	김영창
시행	기반시설과-23429	(	2022.09.26	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 기반시설과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	gyunhyu123@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)