문서번호	시설보수과-24843
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정종영		안종필	09/27
			윤창진
협 조

악취포집설비 설치공사

물량변경에 따른 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

중랑물재생센터

(시설보수과)

***************

물량변경에 따른 설계변경 보고

************에서 추진중인*************관련,  물량 증감에 따른 설계변경 시행보고임.

1	사업개요

□ 사 업 명 : ***********

□ 사업기간 : 2022. 5. 11. ~ 9. 30.

□ 계약금액 : *************

□ 내    용 : *****************************

□ 계 약 자 : ****************

□ 공사감독 : 서울시설공단  공사감독 3처

2	검토내용

□ 현장 여건에 따른 물량 증·감 적정성

❍ 지장물 우회 및 유지보수 편의성 반영에 따른 물량 증감

□ 장비사용 여부 등 경비 산출 적정성

❍ 크레인 등 장비 사용내역, 고재물량 반영 여부 등

3	설계변경 내역

□ 변경금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	466,922,440	469,810,000	증2,887,560
계약기간	2022.5.11.~2022.9.30	2022.5.11.~2022.9.30.	-

□ 주요 변경 내역

(단위:원)

구 분		변 경 내 역	금 액 (원)			비고
			당 초	변 경	증 감
합 계			466,922,440	469,810,000	증2,887,560
시공물량 공 사 비	분뇨동	- 현장여건에 따른 덕트 물량 증감 • 지장물 우회, 부족 물량 추가 등 - 수목이식 공정 제외(자체처리)	95,830,903	110,696,335	증14,865,432
	농축기동	- 현장여건에 따른 덕트 물량 조정 • 지장물 우회, 부족 물량 추가 등	196,298,766	195,374,243	감924,523
기 타		- 안전관리비, 산업안전보건관리비 - 산출경비, 환경보전비 - 폐기물처리비, 고재비 등	132,345,277	121,029,422	감11,315,855
부가세			42,447,494	42,710,000

4	조치계획

□ 덕트 설치구간 지장물 우회 및 유지보수 편의성 확보를 위해 발생된 물량증·감에 따른 설계비 증액은 적정한 것으로 판단되므로,

□ 상기 사항은 설계에 반영하여 변경계약 조치하고, 공사감독 위탁기관인서울시설공단에 해당사항을 통보하고자 함.

붙임 : 설계변경 검토보고서 1부.  끝.