문서번호	에스플렉스센터운영과-24807
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		여인선	09/27
			추경수
협조

에스플렉스센터 UPS(2차) 이중화공사 등 전기공사 추진현황 보고

2022. 9.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 UPS(2차) 이중화 등

전기공사 추진현황 보고

에스플렉스센터에서 추진중인 UPS 안정화 공사 등 3건의 전기공사에 대해 보고드림

1		전기설비 현황

구 분	시 설 현 황	비 고
*********	**************************** ***************************** *************************	********** ******************
*********	************** *********************************************
********	**************** ************************************	*************** ************************
***	******************************	******

2		사업추진 현황

□ (1차) UPS 안정화 공사 (완료) - SBA 추진

구 분		사업규모	계약업체	준공금액 (천원)	준공일	비 고
UPS 안정화공사 (1차)	전기공사	전기공사 1식	한우리	905,969	‘22.8.28.	사고이월 예산
	감리용역	전기감리 1식	㈜윤앤영이앤씨	144,437	‘22.8.16.
	UPS 구매	300kVA 2대	㈜이온	538,861	‘22.2.28.
	STS 구매	STS 12대	㈜재신파워텍	403,803	‘22.7.28.
	PDU 구매	PDU 4대, ACB반 2면	㈜비케이테크	59,958	‘22.4.10.
합 계				2,053,028

※ UPS(Uninterruptible Power Supply): 무정전전원장치로 정전시 전원을 공급해주는 장치

※ STS(Static Transfer Switch): 무정전 전원절체스위치로 정전시 예비 UPS로 전원공급 전환장치

※ PDU(Power Distribution Unit): 전력을 분배하기 위한 장치

※ ACB(Air Circuit Breaker)반: 기중차단기를 포함하는 저압분전반

□ (2차) UPS 안정화 공사 (추진중) - 에스플렉스센터운영과 추진

구 분		사업기간	계약금액 (천원)	계약업체
UPS 안정화공사 (2차)	전기공사 1식	‘22.8.22.~12.20.	617,411	서전엔지니어링(주)
	감리용역 1식	‘22.7.26.~12.26.	51,406	㈜유정이엔지
	분전반 제작(77면)	‘22.8.10.~11. 7.	172,031	엔텍월드(주)
합 계			840,848

ㅇ 추진현황 및 계획

- 전기공사 : 케이블 철거작업 완료, 발전기·공조분야 작업예정

- 분전반 제작 : 현장조사 완료, 제작중으로 10월 말 납품예정

□ 기타 전기공사 (추진중)

구 분		사업규모	사업기간	계약금액 (천원)	계약업체	비고
서지보호기 설치	설계용역	실시설계	‘22.6.10. ~ 7.24.	14,739	㈜극동문화전기설계	완료
	전기공사	서지보호기 395개	‘22.9.15. ~ 12.13.	222,831	㈜문경전설
VCB회로 재구성		전력감시장치 2대	‘22.7.28 ~ 10.30.	20,422	서정전기(주)
합 계				257,992

ㅇ 추진현황 및 계획

- 서지보호기 설치 : 현장조사 완료, 자재준비 후 설치 예정(10월)

- VCB회로 재구성 : 자재 준비 후 설치 예정(10월)

3		향후계획

□‘22.10. : 납품설치 완료 (VCB회로 재구성, 분전반 제작).

□‘22.12. : 공사 준공 (감리용역, UPS 공사, 서지보호기 공사). 끝.