문서번호	재난대응과-34428
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
담당자	대응전략팀장	재난대응과장
신준희	고재흥	09/27
		代고재흥

IoT 소화전 관리시스템 구축 사업 발주계획

IoT 소화전 관리시스템 구축 사업 발주계획

2022.09.27.(화)

서울소방재난본부

(재난대응과)

IoT 소화전 관리시스템 구축 사업 발주계획

재난대응과장 :현진수☎3706-1400 대응전략팀장 : 고재흥☎1410 담당 :신준희☎1413

사물인터넷 기술을 활용하여 소방용수시설을 효율적으로 운영하고 취약지역 환경개선을 도모하고자 하는 IoT 소화전 관리시스템 구축 사업 발주계획임.

Ⅰ		개 요

□ 추진배경

ㅇ 서울특별시 조례 제6329호「서울특별시 사물인터넷도시 조성에 관한 조례」

ㅇ 스마트도시담당관-20637(’22.4.6.)호「’22년 시민체감 사물인터넷 시범 사업 추진계획」

ㅇ 재난대응과-22930(’22.4.28.)호「IoT 소화전 관리시스템 시범운영 계획」

ㅇ 소방용수시설 ․ 비상소화장치 상시 원격관리로 효율성 제고 및 대응능력 강화

ㅇ 불통지역 및 소화전 주변 불법 주․정차 사전차단으로 화재초기 황금시간 사수

□ 사업개요

ㅇ (사 업 명) IoT 소화전 관리시스템 시범운영 계획

ㅇ (설치대상) 종로구 소방차 진입곤란지역(창신동, 부암동) 일대 20개소 이내

ㅇ (사 업 비) 금170,000천원(금일억칠천만원)  ※ 부가가치세 포함

****************************

◎ 지능형 소방통로·소방용수 관리시스템(총 예산 170백만원)

․ 중앙 관리시스템 및 운영서버 1개소 (종로소방서 설치, 29,700천원)

․ 스마트 경고시스템 10개소 (소방차 진입곤란지역 등 취약지역 설치, 6,160천원)

․ 지능형 소화전 관리시스템(일반형) 5개소 (소화전 소재지 설치, 8,910천원)

․ 지능형 소화전 관리시스템(특별형) 2개소(소화전 소재지 중 취약지역 설치, 16,830천원)

※ 시장조사를 통해 산출한 단가로 추후 협상에 의해 금액 및 추진수량 등 변동 가능(예산타당성 심사 完)

ㅇ (예산과목) 자산 및 물품취득비(405-1)*

* 지식정보사회 선도기반구축 / 정보화 기반시설 확충 / 사물인터넷도시조성

※ 시 디지털정책담당관(구.스마트도시담당관) ’22년 사물인터넷 시범사업 선정(’22.4.6.)

ㅇ (계약방법) 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

Ⅱ		사업 세부내역

□ IoT 소화전 관리시스템 기능별 분류

① IoT 소화전 현장 시스템(3가지 종류, 하단 참고)

- 공설 소화전 옆에 센서부, 스피커, 경광등 및 지능형 단말부로 구성된 폴대(Pole)을

설치하여 불법 주정차 및 소화전 현장 상태 감시를 위한 H/W 시스템

스마트 경고시스템	지능형 소화전 관리시스템(일반형)	지능형 소화전 관리시스템(특별형)
불법 주정차 시 경광등 및 불법주차 음성메시지 알림 기능	불법 주정차 방지 기능, 온도, 압력 모니터, 동파 방지 기능 등	기본형 버전을 토대로 CCTV 기능, 가로등(LED) 기능 등이 추가 설치

※ 동력원은 전기, 태양광 등 선택 가능(장단점 고려)

② IoT 소화전 중앙관리시스템

- 현장 시스템의 데이터를 전송받아 119상황실(본부 또는 소방서)에서 모니터링 및

제어할 수 있는 S/W 시스템

< IoT 지능형 소방용수·소방통로 관리시스템 기능별 세부내용 >

구 분	내 용
①-1 IoT 소화전 현장 시스템 (스마트경고)	· 소화전 및 비상소화장치에 대하여 IoT 기술을 활용하여 효율적인 소화전 관리 및 불법 주정차 관리를 할 수 있도록 관리시스템을 구축 - 센서를 통한 소화전 앞 불법 주정차 관리 및 예방 기술 구축 - 경광등 및 불법 주정차 음성메시지 알림 기술 구현 - 중앙관리 운영솔루션과 연동하여 소화전의 위치 및 불법 주정차 등 소화전 현장 상태정보를 GIS 맵을 통해 표출하도록 구축
①-2 IoT 소화전 현장 시스템 (일반형, 특별형)	· 스마트경고시스템의 모든 기능과 연동을 포함하고, 온도 센서 및 수압 센서를 통하여 원격으로 모니터링 및 제어할 수 있도록 구축 - 특별형의 경우 CCTV 기능을 포함하여 소화전 상태 확인 및 불법 주정차 상태 모니터링을 할 수 있도록 구축
② IoT 소화전 중앙관리시스템	· IoT 소화전 현장시스템(경고 시스템, 일반형, 특별형)의 실시간 모니터링 및 관리를 중앙(본부 또는 권역별 중심 소방서)에서 운영할 수 있도록 구축 · 현장 소화전에 대한 GIS 위치정보, 상태정보, 관리카드, 통합점검, 관리 시스템을 통하여 점검제어, 센서 제어, 이력 관리 등을 할 수 있도록 구축

□ 운영시스템 구성도 및 운영사례

[ 타시도 운영 사례(2019년 ~ 현재) ]

대구, 경북, 충북 등 6개 시도 100여 개소 운영 중 / '22년 경기도 과천시 등 구축 예정

□ IoT 소화전 관리시스템 기능 보충 설명

ㅇ 불법 주정차 관리

- 소화전 불법 주정차 시 안내방송 및 경광등 점등을 통해 차량 이동 유도

- IoT 지능형 컨트롤러 장치는 센서 수집된 정보를 전송하고, 주정차 감지센서와

연동하여 불법 주정차 감지 시 주정차금지 안내 멘트가 자동으로 방송

- 관제 PC에서 안내방송 및 경광등 제어 가능(방송여부, 음량, 시간대별 작동)

- 소화전 관리시스템 운영 상황에 따라 CCTV를 도입하여 불법 주정차 감시

및 소화전 주변 영상 감시 시스템으로 운영

ㅇ 소화전 관리

- IoT 지능형 소화전은 센서기술을 적용하여 온도, 압력, 주정차 감지 기능을

포함하며 상태를 소화전 관리 플랫폼 서버로 전송

- 관리되고 있는 소화전의 점검 이력 및 고장유형별 관리

- 서울시 해당 관내 소화전 GIS 위치정보를 운영솔루션에 표출

- IoT 지능형 소화전 관리시스템의 운영솔루션은 중앙(본부 또는 해당 소방서)

에 설치하고 해당 소화전 관리시스템이 설치되어있는 소방용수시설에 대한

기본대장 등 조사부 작성 관리

ㅇ 통신망 구성

- 소화전 관리 플랫폼 서버와 현장 단말 통신은 NB-IoT/LoRa/LTE 통신망을

사용하여 구성

□ H/W 및 S/W 구매 범위

연번	품명	규 격	단위	수량
*	************* *****	********************************	*	*
*	************* *****	*********************************************************************	*	*
*	************	**************************** ******************************** ******** ***************************** ********** ************* ********************* ********************* ********************* **********************	*	*
*	**	************************ ********************** **** *********************** ********************** ******************	*	**
*	**********	************************* *********************** *********** ********************* *********************************	*	*
*	***	*************** *********************** ****************************************************************** **************** *************************************** ************************************** ************************* ****************************** ************* *************************** ****************** ********************* *************************** ************* *************************** ****************** *********************** ********************* *********************** *************** *************************	*	**
*	********	***************************** ************** *************************** ***************************	*	*
*	***	*************** **********************	*	*

Ⅲ		그간 추진사항

ㅇ 사물인터넷 시범사업 요청서 제출(스마트도시담당관)	3. 14.

ㅇ 2022년 시민체감 사물인터넷 시범사업 최종 선정	4. 8.

ㅇ 시범운영 후보 지역(종로 등 6개 구) 답사	4. 11. ~ 4. 22.

ㅇ IoT 소화전 관리시스템 시범운영 계획(방침서) 수립	4. 28.

ㅇ 시범운영 세부 지역(종로구 창신동, 부암동) 선정	5. 3. ~ 5. 6.

ㅇ 정보화사업 예산타당성 심사(적격)	5. 17. ~ 5. 25.

ㅇ 종로구청 관련 부서 업무협의	6. 10. ~ 8. 24.

- (6.22.) 설치 예정지 취약상황 정량적 분석을 위한 주정차 단속 자료 협조(주차관리과)

- (8.16.) 종로구 도시비우기 실무협의회 심의 신청(도시디자인과)

- (8.19.) 종로구 도시비우기 심의회 참석(사업내용 발표 등)

- (8.24.) 종로구 도시비우기 실무협의회 심의 결과 – 가결 20개소

ㅇ 제안요청서 검토의뢰 및 회신(정보시스템담당관)	8. 22. ~ 9. 7.

ㅇ 정보화사업 보안성 검토의뢰(정보통신보안담당관)	8. 29.

ㅇ 정보화사업 과업심의위원회 개최	9. 19.

ㅇ 제안요청서 사전 공개(의견 1건 – 수용)	9. 19. ~ 9. 22.

Ⅳ		향후 일정

ㅇ 사업 발주 의뢰(서울시 재무과)	9. 28.

ㅇ 입찰공고	10. 4. ~ 10. 13.

ㅇ 제안서평가, 사업자 선정 및 협상	10. 14. ~ 10. 21.

ㅇ 사업수행 및 검수(테스트 기간 포함)	10. 24. ~ 12. 16.

붙임  1. IoT 소화전 관리시스템 시범운영 계획(방침서) 1부.

2. 제안요청서 1부.

3. 산출내역서 1부.

4. 사전절차 검토결과* 1부.  끝.

* 예산타당성 심사, 제안요청서 검토, 보안성 검토, 과업심의위원회, 사전규격 공개

(본 사업은 계약심사, 일상감사, 정보시스템 감리, 사전협의 비대상 사업임)