문서번호	토목부-31113
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		한병찬	09/27
			하현석
협조
	주무관		도제경

실정보고(버스정류소 이전 및 한강둔치 주차장 복구) 검토 보고 [올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사]

2022. 9.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

실정보고(버스정류소 이전 및 한강둔치 주차장 복구) 검토 보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』 관련 한가람로 진입램프 신설공사에 따른 버스정류소 이전 및 한강둔치 주차장 원상복구를 위한 실정보고 검토보고임

[관련근거] 실정보고(한가람로 버스정류소 이전 및 한강둔치부 주차장 복구에 대한 관계기관 요청사항 설계반영

[올대감22-167호( '22.09.22.)]

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 위    치 : 송파구 풍납동 일원

○ 규    모 : 램프신설 L=1,600m(교량 L=446m) / 램프이설 L=1,309m(교량 L=139m)

○ 기    간 : 2016.04.01. ~ 2022.12.31.(7차 '22.5.10.~22.12.31.)

○ 사 업 비 : 61,379백만원(7차 9,172백만원)

○ 시 공 사 : 대보건설(주) 외 2개사 / 감 리 단 : (주)이산 외 2개사

Ⅱ		보 고 내 용

○ 한가람로 진입램프 공사로 인해 저촉되는 버스정류소 이전 및 한강둔치 주차장 복구를 위한 시설물 유지관리기관의 요구사항(협의내용) 설계반영이 필요한 실정임

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		검 토 내 용

□ 한가람로 버스정류소 이전

○ 실정보고 검토

- 당초 단순 버스정류소 철거 및 신설만 계획되어 있으나, 해당 정류소 운영(협약)※에 따라 BIT(버스정보표시), BMS(버스교통정보) 등을 포함한 버스정류소 이전 계획 수립

※ 서울특별시 가로변 정류소 개선사업 협약서(2011.09.30/서울버스운송사업조합,㈜KT)

- 기존에 설치되어 있는 휀스(72m) 및 이전 버스정류장~공사구역(48m)까지 무단횡단방지휀스를 서울시 디자인 심의제품으로 교체 및 신설

‣ 수량 : (당초) 36경간 → (변경) 60경간 (증, 24경간)

< 버스정류소 이전 및 디자인휀스 설치계획 >

***********************

○ 공사비 검토

- 공사비 증·감 현황

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************

발주처(안)	시공사(안)	적용	비고
**********	********	**********	*************

**************************************************

**********************************************

**********************************************************

- 예산조치 계획

• 총사업비(61,379백만원) 범위내에서 시행 가능

***************************************************************************

□ 한강둔치 주차장 복구

○ 실정보고 검토

- 주차장 복구(공원시설과)

연번	요청사항	반영계획	비고
1	************** ************************************************************************	********************* ****************** ************* ********************
2	************** ********************************************	************************ *************** *************
3	******* ******************************	********************* ****************** ************* ********************** ***********
4	******* ************************************************ **********************************************	********************* ************************** ***************************** ************* ************** ****************** **************
5	********************	*******************************

< 주차장 복구계획 >

*****

- 화장실 복구(환경수질과)

연번	요청사항	반영계획	비고
6	****************************************************	**************** ***************** ***************** **********************
7	**************************	*************** ***************** ******************* ****************

< 화장실 복구계획 >

******

- 기타 물량 정산 : 당초 한강둔치에 계획된 공사용 가도 미조성에 따른 아스콘 포장 물량 제외(감, 1,904㎡)

****

○ 공사비 검토

- 공사비 증·감 현황

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************

발주처(안)	시공사(안)	적용	비고
**********	********	**********	*************

**************************************************

**********************************************

**********************************************************

- 예산조치 계획

• 총사업비(61,379백만원) 범위내에서 시행 가능

***************************************************************************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 한가람로 진입램프 공사로 인해 저촉되는 버스정류소 및 한강둔치 주차장 등 원상복구를 위한 관계기관 협의내용을 설계에 반영하고자 하는 사항으로 책임건설사업관리기술인의 검토의견과 같이 적정한 것으로 판단되므로 원활한 공정추진을 위하여 실정보고를 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  실정보고서 1부.  끝.