문서번호	건축부-30057
결재일자	2022. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설계과장	건축부장
오종근		홍순명	09/27
			신명승
협 조

『잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사(학생체육관신축 포함)』

설계용역기간 연장처리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  9.

도시기반시설본부

【시설국 건축부】

『잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사(학생체육관신축 포함)』

설계용역기간 연장처리 보고

Ⅰ		사 업 개 요

□ 위    치 : 송파구 올림픽로25일대

□ 지역지구 : 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 도시계획시설(체육시설)

□ 건축규모 : ***************************

**********************************************

***********************************************

***********************************************

*******************************************************

***********************************************************************

*****************************************************

************************************************

********************************************

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’17.  7.     :「올림픽 주경기장 리모델링 기본계획」수립(동남권사업과)

○ ’18.  5.     : 주경기장 리모델링 국제설계공모 당선작 선정(동남권사업과)

○ ’18. 12.     :「잠실 학생체육관 이전 신축 기본계획」수립(동남권사업과)

○ ’20.  1. 15. : 설계용역착수(동남권사업과)

○ ’21.  4. 26. : 기본설계완료 통보(동남권사업과→도시기반시설본부)

○ ’21.  5. 13. : 1차 설계설명회 개최(도시기반시설본부)

○ ’21.  8. 23. : 건설사업관리용역 착수(도시기반시설본부)

○ ’21.  8. 27. : 2차 설계설명회 개최(도시기반시설본부)

○ ’21.  9. 28. : 건설사업관리용역 착수보고회 개최(도시기반시설본부)

○ ’21. 10. 22. : 도시기반시설본부장 보고회 개최

○ ’22.  1. 13. : 시설국장 보고회 개최

○ ’22.  1. 14. : 설계용역기간 연장(동남권사업과, ’22. 8.31까지)

○ ’22.  4. 29. : 실시설계 자문회의개최(1차)

○ ’22.  5.  9. : 실시설계 자문결과 보고(본부장)

○ ’22.  5. 12. : 현안사항 조치요청(도기본→동남권사업과)

○ ’22.  6.  8. : 실시설계일정 조치요청(도기본→동남권사업과)

○ ’22.  6. 10. : 기본설계 확정도서 송부(동남권사업과→도기본)

○ ’22.  7. 25. : 시설국장 설계중간보고회 개최

○ ’22.  9.  2. : 설계용역기간 연장(동남권사업과, ’23. 1.31까지)

○ ’22.  9. 16. : 설계용역 연장보고(시설국장)

Ⅲ		설계용역 연장

□ 근    거 : 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 변경계약 체결 알림【동남권추진단-418(’22.09.02.)】

□ 계약상대자 : ㈜나우동인건축 컨소시엄(삼우종합건축, NBBJ)

□ 계약금액 : *****

□ 계약기간 : *************************

구분	일자	계약기간	변경사유	증감
최초	’20.1.10.	********** ************	*	*
1차변경	’22.1.14.	********** ***********	**************************************	*****
2차변경	’22.8.31.	********** ************	*********************************	***

※ 「******************************************************************************************************

************************************************

※ 설계용역 추진경위

*************	*************	*******
*********	************ **********	****

Ⅳ		향후 일정

□ ’22.  9월 : ****************

□ ’23.  1월 : *******

□ ’23.  3월 : *****

□ ’26.  9월 : *************

첨부  1. 동남권사업추진단 공문 1부.

2. 설계예정공정표(변경)  1부.

3. 설계용역변경계약서 1부.

4. 현대차 GBC공공기여 이행계획 수립방침서(행정2부시장 방침 제91호) 1부.  끝.