문서번호	총무과-37471
결재일자	2022. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		통신관리팀장	총무과장
김경선		주덕현	09/29
			이계열
협조

「2022년 본관 청사 통신공사(연간단가)」

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

행 정 국

(총무과)

「2022년 본관 청사 통신공사(연간단가)」

설계변경 검토 보고

조직개편과 맞춰 추진된 프레스센터 사무실 신설 관련 통신공사 추진사항을 2022년 본관 청사 통신설비(연간단가) 공사에 반영 설계변경 처리하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 본관 청사 통신공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2022. 1. 1. ~ 12.31.

ㅇ 계약금액 : 213,352,200원

ㅇ 계 약 자 : ㈜성진정보통신 대표 문계철

ㅇ 계약내용 : 본관 청사 통신설비 유지보수 연간단가 1식

□ 변경내용

ㅇ 변경사유

- 본 공사는 본관, 서소문2청사 및 기타 청사 통신설비에 대한 유지보수 및 신․이설을 시행하기 위해 연간단가 계약으로 체결한 공사임

- 조직개편에 맞춰 신속 추진된 프레스센터(4~6층) 사무실 신설 관련 통신공사 추가 물량 발생에 따라 계약 물량 조정이 필요하여 변경 계약하고자 함

ㅇ 변경금액 : 금348,532,000원

구 분	계약 금액	설계변경금액	증감액	비고
총공사비	213,532,200원	348,532,000원	134,999,800원

※ 세부내역 붙임2 설계변경서 참조

ㅇ 공사기간 : 변경 없음

□ 검토결과

ㅇ 관련규정 : 행정안전부 예규 제197호(2022. 1. 11.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

ㅇ 설계변경으로 인한 계약금액 조정(물량증감)

- 제13장(공사계약 일반조건) 제7절(계약금액의 조정)

- 물량증감 : 증감된 공사량의 단가는 계약단가 적용

ㅇ 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료의 사후 정산 처리

- 제1장(입찰 및 계약 집행기준) 제8절(보험료 사후정산 등)

□ 예산과목

ㅇ 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리, 사무실재배치에 따른 시설 개·보수, 시설비 : 87,346,200원

ㅇ 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비 : 126,186,000원→ 변경 261,185,800원(증 134,999,800원)

□ 향후일정

ㅇ ’22. 10. 4.      변경 계약 의뢰(재무과)

ㅇ ’22. 10. ~ 12.  각종 통신공사 시행

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 설계변경서 1부.