문서번호	도시철도토목부-3715
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이형일		최진규	03/30 최병훈
협조
	주무관		한재호

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

강일역 주변 공원복구 시행 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

강일역 주변 공원복구 시행 검토

「하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사」 강일역 주변 공원복구와 관련 시행에 대하여 검토보고 드림.

※ 관련문서 : 하남 제21-168호(‘21.3.17.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015. 3.30. ~ 2022.7.31.

○ 공사금액 : 98,077백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		공원복구 현황

○ 공원 위치도

○ 공원복구 면적

구 분	복 구 면 적(㎡)			비 고 (면적비율)
	당 초	변 경	증·감
출입구 #1	767	3,494	2,727	증 355.5%
출입구 #2	684	1,263	579	증 84.6%
출입구 #3	897	897	0	-
출입구 #4	1,220	3,656	2,436	증 199.7%
계	3,568	9,310	5,742	증 260.9%

○ 설계도면(평면도)

당 초	1번 출입구 4번 출입구 2번 출입구 3번 출입구 강일육교
변 경	2번 출입구 3번 출입구 1번 출입구 4번 출입구 강일육교

3		추진경위

○ ‘15.12.08./12.28. : *******************(출입구 연장 요청)

○ ‘16.06.22. : H1정거장 출입구(#1,2,4) 연장요청 검토(본부장 방침)

- #1,4번 출입구는 생태통로 앞까지 연장 및 조정

- #2번 출입구는 강일리버파크 방향 교회 건물 앞까지 연장

○ ‘19.12.02. : H1정거장 외부출입구 변경설계 검토보고(본부장 방침)

○ ‘20.11.04. : 공원복구 관련 협조 요청사항 통보(강동구청 → 도기본 → 관리단)

○ ‘20.12.18. : 공원복구 관련 1차 업무협의(강동구 푸른도시과, 도기본, 현장관계자)

- 공원 화강판석→보도블럭으로 변경, 파고라 및 플랜터 감조정, 식재수량 감조정 등

○ ‘21.01.28. : 공원복구 설계서 검토결과 제출요청(도기본 → 관리단)

- 상록교목(소나무 등) 및 낙엽교목(느티나무 등) 수량 감조정 지시

○ ‘21.02.01. : 공원복구 관련 2차 업무협의(강동구 푸른도시과, 도기본, 현장관계자)

- 추가 반영 요청사항은 설계내역 조정 범위 내에서 조정(추가 증액 불가)

○ ‘21.03.29. : H1정거장 주변 공원복구 관련 원설계자 의견 회신((주)유신)

	< 원설계자 의견 >
- H1정거장 외부출입구 변경 설계는 ************************************************에 대한 해결방안으로 진행된 것으로, H1정거장 주변 공원복구는 유관기관과 협의하여 안전시공요함.

4		건설사업관리단 보고내용

○ 현    황

- 주민요구사항을 검토하여 강일역 외부출입구(#1,2,4)을 변경하였으며, 이에 따라 공원복구(훼손) 면적 증가 및 강동구청 요구사항 반영

구분	외부출입구 위치 변경 내용
당초
	벌말공원에 출입구 설치로 기존 보도 보행권 확보 및 공원을 통한 출입구 이용
변경
	고덕리엔파크, 강일리버파크 아파트 주민 이용동선 개선을 위해 출입구 조정 설치

○ 공사비 변경개요 (총괄)

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
출입구 #1.0	129,568	479,475	349,907
출입구 #2.0	21,427	76,202	54,775
출입구 #3.0	51,288	147,657	96,369
출입구 #4.0	65,112	469,730	404,618
직접공사비	267,395	1,173,064	905,669
제 경 비	-	103,073	103,073
제요율제외	73,605	291,863	218,258
도 급 액	341,000	1,568,000	1,227,000
관 급 비	64,330	78,900	14,570
총 공 사 비	405,330	1,646,900	1,241,570

○ 건설사업관리단 의견

- 강일역 출입구 변경설치에 따른 공원 내 수목 및 시설물 이설 협의조건 이행 및 강동구청(푸른도시과) 요구사항을 설계반영해 시행코자 함.

- 하남선 2단계 구간 개통(‘21.3.27.)에 따른 조경공사를 조속히 추진하여 시민불편을 최소화하고자 함.

6		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 강일역 출입구 변경에 의한 공원복구 시행에 대하여 건설사업관리단 보고내용과 같이 승인하고,

- 추가공사비 : (증)1,241,570천원(도급비 1,227,000, 관급비 14,570)

○ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산·반영하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 공문 일체 1부.

2. 설계 조정내용 1부.

3. 출입구별 수량 증감 및 공사비 현황 1부.  끝.