문서번호	창업정책과-25452
결재일자	2022. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	서북권창업팀장	창업정책과장
김치만	김태승	09/29
		이병철

- 용산 상상가 및 디지털대장간 -

인테리어 설계 용역 완료 보고 및 공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

경 제 정 책 실

(창업정책과)

- 용산 상상가 및 디지털대장간 -

인테리어 설계 용역 완료 및 공사 추진 계획

용산 상상가 및 디지털대장간 공간 재배치 등 전자제조 창업기업 입주공간 마련과 환경개선 인테리어 설계 용역을 완료하고 공사를 추진하고자 함

1	챌	추진개요

□ 추진근거

○ IT·H/W 융합 용산 전자제조 스타트업 클러스터 조성계획/창업정책과-1539('22.2.)

○ 용산전자상상가 리모델링 추진검토보고('22.3)

○ 용산전자상상가 인테리어설계 용역 추진계획/창업정책과-21606('22.5.)

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 용산 상상가 및 디지털대장간 인테리어 설계 용역

○ 용역기간 : ’22.08.09. ~ ’22.09.23.(착수일로부터 45일)

○ 과업내용 : 용산 상상가 및 디지털대장간 공간 재배치 등 창업기업 입주공간 및 환경개선 인테리어 설계

- 사업범위

구 분	면적(㎡)	공 간
대장간(2층)	244	마이크로팩토리
		시립대(VR센터)
상상가(3층)	432	코워킹공간
		운영사무실 및 회의실
		공유주방
합계	676

********************

***************

**************************

******************************************

2	챌	완료(결과)보고

□ 세부추진내용

○ 인테리어 설계 반영 내용

구 분	면적(㎡)	내 용
대장간(2층)	***	************* *******************************
상상가(3층)	***	********************** ****************************************************************** ***************************************************** ************************************************** **********************
기타(공통)	*	************* *******

○ 인테리어 공사 산출 총금액 : **********

구분	합계(천원)	건축	전기	통신	소방
공사비	*******	*******	******	******	******

○ 성과품 납품내역

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비 고
1	설계설명서	A4	5	부
2	설계도면	A3	5	부	반접이
3	주요부 투시도				납품 설계 도서에 첨부
4	물량 산출 계산서	A4	5	부	내역서 포함
5	산출 내역서				설계 설명서 책자 첨부
6	공사 시방서				주요자재 사양서 포함
7	USB	16G	1	개	공종별 통합

○ 인테리어 투시도

************************************************************************************

○ 설계도면

*************************************

□ 추진경과

○ 인테리어 설계 용역 방침 수립          : ’22.05.12.

○ 인테리어 설계 용역 계약 체결          : ’22.08.09.

○ 인테리어 설계 용역 착수               : ’22.08.10.

○ 인테리어 설계 용역 완수               : ’22.09.23.

3	챌	인테리어 공사 시행

□ 추진방향

○ 인테리어 설계 용역 성과물을 반영하여 공사 추진

○ 설계 의도 반영 및 공사의 안정성과 책임성 제고를 위한 감리 실시

○ ’22년 하반기 지방재정 집행관리 적극활용 지침에 따라 긴급입찰 실시

※ '22년도 지방재정 적극집행 관련 입찰은 특별한 사유가 없는 한 긴급입찰

□ 추진계획

○ 공사

- 소요예산 및 계약방법                          [단위:천원, 일]

공사대상	소요예산	계약방법	공사기간	공사내용
합 계	*******	*	**	*
건축공사	*******	******	**	*************************
전기공사	******	*****	**	**********
통신공사	******	*****	**	**************
소방공사	******	*****	**	***********************************

※ 수의계약 근거

- 지방계약법 시행령 제30조제1항제2호(추정가격이 2천만원 이하 공사)

- 예산과목 : 경제정책실 창업정책과, 창업생태계 활성화를 통한 경제 활력 제고, 체계적 창업시스템 구축, 용산전자 상상가 운영 및 창업거점 조성, 시설비

○ 감리용역(비상주 감리)

- 용역기간 : 용역 착수일로부터 공사준공(30일) 후 7일까지

- 소요예산 : 금4,000천원

- 계약방법 : 수의계약

· 근거 : 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목(추정가격이 2천만원 이하 용역)

- 예산과목 : 경제정책실 창업정책과, 창업생태계 활성화를 통한 경제 활력 제고, 체계적 창업시스템 구축, 용산전자 상상가 운영 및 창업거점 조성, 감리비

4	챌	향후 추진일정

□ 인테리어 설계 용역

○ 인테리어 설계 용역 준공 처리 및 준공금 지급    : ’22.10.

□ 인테리어 공사 및 감리 시행

○ 인테리어 공사 및 감리 발주 및 계약     : ’22.10.

○ 인테리어 공사 및 감리 착수             : ’22.10.

○ 인테리어 공사 및 감리 준공             : ’22.11.

※ 용산 상상가 인테리어 공사 및 감리는 일상감사, 계약심사, 기술용역심사 제외 대상임

- 일상감사 제외 대상 : 추정가격 20억원 미만 종합공사 및 10억원 미만 전문공사

(전기,정보통신, 소방 공사)

추정가격 10억원 미만 용역

추정가격 2천만원 이하 1인견적 수의계약

- 계약심사 제외 대상 : 추정가격 5억 미만 일반공사(건축, 토목) 및 3억 미만 전문

공사(조경, 전기, 정보통신, 소방 공사)

추정가격 2억원 미만 용역

- 기술용역심사 제외 대상 : 추정가격 1.5백만원 이하 용역

붙임 : 인테리어 설계 설명서(성과물) 1부.  끝.