문서번호	보행자전거과-1958
결재일자	2022. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	보행자전거정책팀장	보행자전거과장
박성훈	최미숙	09/29
		오세우

잠수교 차 없는 다리 시범운영

교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역 변경계약

2022. 9

도시교통실

(보행자전거과)

잠수교 차 없는 다리 시범운영

교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역 변경계약

잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역과

관련하여 추가비용이 발생함에 따라 계약을 변경하고자 함

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역

ㅇ 용역기간 : ’22. 8.25 ~ 10.24

ㅇ 용 역 사 : 조은통상(대표자 윤순노)

ㅇ 계약금액 : 금53,250,000원(금오천삼백이십오만원)

□ 변경내용

ㅇ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구분	변경내용		비고(증)
	당초	변경
계약 금액	53,250,000	**********	*********

ㅇ 증액 사유

- 당초 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리를 위해 '22.8.28(일), '22.9.4(일) 양일간 2회 기준으로 계약을 체결했으나,

- 축제 주관 한강사업본부에서 '22.9.4(일) 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제를 태풍(힌남노)으로 인해 취소하고 '22.9.18(일)로 연기한 바 교통통제 안내 현수막 및 입간판 철거·재설치에 따른 추가 비용이 발생함

ㅇ 귀책 사유 : 서울시

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

ㅇ 변경계약 의뢰(재무과)  : '22.10.4

붙 임 1. 계약변경(증액) 산출내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.