문서번호	토목부-31274
결재일자	2022. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김현중	김상익	09/29
		하현석

설계용역 등 준공기한 연기 검토 보고(성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계)

설계용역 등 준공기한 연기 검토 보고

<성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계>

2022. 09.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계용역 등 준공기한 연기 검토 보고

<성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계>

교통안전시설 심의 등 행정절차 이행기간 추가 소요에 따른 설계 및 건설사업관리(설계감리) 용역 준공기한 연기요청이 있어 검토 보고드림.

□ 용역개요

용역명	성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계 용역	성동교 확장 및 진입램프 신설 설계단계 건설사업관리 용역
과업내용	- 성동교 확장 1개 차로(7차로 → 8차로) 230m - 진입램프 확장 ( 4.75 m → 7.5 m) 112m
계약기간	2020. 7. 28. ∼ 2022. 9. 30.	2021. 6. 28. ∼ 2022. 10. 15.
계약금액	**********	*********
계약자	㈜수성엔지니어링 대표 강병윤외 2개사	㈜서우티이씨, 대표 강대신

□ 추진현황

ㅇ '20. 07.	: 설계용역 계약

ㅇ '20. 09. ~ 12.	: 하천 협의(서울지방국토관리청, 5회)

ㅇ '21. 03.	: 전문가 자문회의

ㅇ '21. 08.	: 특정공법 심사

ㅇ '21. 12.	: 설계VE

ㅇ '22. 02.	: 공공디자인 심의(조건부)

ㅇ '22. 04.	: 건설기술심의(조건부)

ㅇ '22. 05.	: 도로점용공사장 교통소통대책 자문 요청

ㅇ '22. 06.	: 도로점용공사장 교통소통대책 보완서 제출

ㅇ '22. 07.	: 교통안전시설심의 요청

ㅇ '22. 08. 30.	: 교통안전시설심의 개선 설치 통보

□ 준공기한 연기

**************************************************************

ㅇ 준공일

*****************************************************

******************************************************

ㅇ 계약금액

************************************

*************************************

ㅇ 귀책소재 : 서울특별시

ㅇ 지체상금 : 미부과

□ 검토의견 및 조치계획

*************************************************************************************

ㅇ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업 추진에 차질이 없도록 조치하고자 함.

붙임  1. 관련공문  1부

2. 합의각서  1부.  끝.