문서번호	동물복지1과-23830
결재일자	2022. 9. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		동물복지1과장		동물원장
이은형		김보숙		09/30
				권수완
협 조
	전략기획실장				구재성
	총무과장				김중태
	주무관				손영민

공작마을 관리자 보행교 설치공사 변경에 따른

낙찰차액 사용보고

2022. 09.

서울대공원

(동물복지1과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

공작마을 관리자 보행교 설치 공사 변경에 따른

낙찰차액 사용 보고

현재 시행 중인 공작마을 관리자 보행교 설치공사에 대해 공사 면적 추가에 따라 낙찰차액을 활용하여 추진하고자 함

Ⅰ	공 사 개 요

□ 공 사 명 : 공작마을 관리자 보행교 설치

□ 공사기간 : 2022. 9. ~ 10.

□ 공사내용

- 공작마을 관리자 이동구간에 보행교량 및 난간 설치

- 직원 통행로에 계단 및 경사로 설치

□ 계약금액 : ***********

Ⅱ	공사변경 내용

□ 변경 사유

- ******************************************

□ 공사변경 내역

□ 변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
합 계	***********	***********	**********
물 품	***********	***********	**********
조달수수료	********	**********	*******

□ 낙찰차액 사용계획

- 2022년 동물복지1과 시설비 낙찰차액 사용

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리

기능 및 야생동물 종보전, 동물사육관리 및 환경조성, 시설비

- 시설비 집행현황(2022.9.28. 기준)

(단위:천원)

예산액	품의액	원인행위액	지출액	낙찰차액
*********	*******	*******	*******	******

Ⅲ	행정사항

□ 전략기획실 : 낙찰차액 활용 협조

□ 시설과 : 공사 면적 추가에 따른 설계변경 및 시행 .  끝.