문서번호	교량안전과-31039
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍		강천수	10/04
			조현석
협조

현장실정사항 검토보고

[한남대교(하류교) 보수공사]

2022. 10.

안전총괄실

(교량안전과)

현장실정사항 검토보고

[한남대교(하류교) 보수공사]

『한남대교(하류교) 보수공사』중 건설사업관리인으로부터 제출된 실정보고건에 대하여 검토하고 처리계획을 보고 드림.

□ 공사개요

공 사 명	2022년 한남대교(하류교) 보수공사	공사기간	‘22. 4. 25. ~ '22. 10. 31.
공사규모	절삭후 아스팔트덧씌우기 : 65.6a 교면방수공 6,561㎡, 교면상판 보수 6㎡, 기타 부대공 1식
총사업비	총 공사비 : 1,100,000,000원 도급 비 : 735,896,900원, 관급자재비 : 180,745,000원, 이전비 및 낙찰차 등 : 183,358,100원
계약상대자	(주)엠비디산업 대표 김건영

□ 감리단 보고내용

○ 관련문서

-“실정보고[교면포장구간 변경(추가) 및 공사기간 연장]”

(한강교량감-2022-496호, '22. 9. 28)

○ 보고내용

1) 한남대교(하류교) 추가포장 검토(신축이음장치까지)

- 당초 : 교면포장구간(WP10~WP15)

- 변경 : 교면포장구간 연장(WP9~WP15)(신축이음까지 : 53M 추가)

	추가포장 사유
▶교면포장은 유지관리를 위해 구간(SPAN)별로 시공하는것이 효율적이나, 당 구간(한남대교 하류WP10→WP9)은 신축이음이 아닌 SPAN 중간에 포장이 끝나게 되어 시공이음으로 인한 접속부 파손 및 정밀한 방수가 어렵고, ▶SPAN내 포장제외 구간의 노후, 망상균열 등 포장파손이 심화되고 있어 금회 시공시 포함하는 것이 공사로 인한 교통통제 불편해소와 시민안전과 유지관리에 유리함.

- 추가 포장구간

추가구간	당초 : 시공구간 (P10~P15,86a) 추가 : 시공구간 (P9~P10,11.6a) 추가 : 시공구간 (R-C,1.5a)
추구구간포장면

2) 추가공사 등에 따른 공사기간 연장 시행

- 당초 : '22. 4. 25. ~ 10. 31.

- 변경 : '22. 4. 25. ~ 11. 30.[추가 소요 30일,  관할경찰서 협의(도로공사 통제 4월~8월초) ,추가공사 등]

※ 지연배상금(자체상금) 대상아님(공사계약일반조건 제8절, 발주기관이 설계변경을 인정할 경우)

3) 주요 공종 수량 증·감 현황

구 분		단위	수량 증・감 현황			비고
			당초	변경	증・감
1.포장공	절삭 후 아스팔트 덧씌우기	a	65.61	78.11	12.50
	바닥판 바탕정리, AP 및 방수층 제거	a	65.61	78.11	12.50
	교면방수(MCOD복합)	M2	6,561	7,811	1,250
	유공관+성형줄눈+주입줄눈	M	1,309	1,603	294
2.부대공	차선도색(백색,황색,문자기호)	M	2,004	2,336	332
	장비유도원(야간)	일	24	24	-
	교통정리원(야간)	일	14	14	-
3.관급자재	아스콘(표층용)	톤	1,334	1,686	352	할증포함 T=9cm반영
4.폐기물처리	폐콘크리트(덩어리)	톤	1	1	-
	폐아스콘(평삭재)	톤	862	1,244	382	T=7cm반영
	혼합폐기물(아스콘혼폐)	톤	372	409	37	T=2cm반영

4) 공사비 조정 현황

- 공사비 증·감 대비표                                   (단위:원, VAT포함)

공 종		규격	단위	수량	금 액		증・감	비고
					당 초	변 경
1.	포 장 공		식	1	402,998,652	479,579,585	76,580,933
2.	부 대 공		식	1	31,634,665	32,530,158	895,493
①	직접공사비				434,633,317	512,109,743	77,476,426
②	제경비	vat포함	식	1	301,263,583	302,297,257	1,033,674	사후정산 예정분 반영
Ⅰ.	도 급 액	①+②			735,896,900	814,407,000	78,510,100
Ⅱ.	관급자재				180,745,000	206,050,000	25,305,000
Ⅲ.	이전비				50,874,000	57,332,000	6,458,000	폐기물처리
	총공사비	Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ			967,515,900	1,077,789,000	110,273,100

※ 계약초과 수량에 대한 단가 : 계약단가적용, 신규비목 단가(해당없음)

- 총공사비 조정 현황                                      (단위:원, VAT포함)

구 분		총공사비 조정 현황			비 고
		당 초	변 경	증・감
Ⅰ.	도 급 액	735,896,900	814,407,000	78,510,100	• 예산액[한남대교(하류교)] → 1,100,000,000원 • 도급액+관급비+폐기물 → 967,515,900원 • 낙찰차, 계약삼사절감액, 이전비등 → 132,484,100원
Ⅱ.	관급자재	180,745,000	206,050,000	25,305,000
Ⅲ.	이전비	50,874,000	57,332,000	6,458,000
	총공사비	967,515,900	1,077,789,000	110,273,100

※ 공사비 확보방안 : 추가 보수액 ≒110백만원은 당해 사업비인 낙찰차,계약심사절감액 등 사용

○ 감리단 검토 의견

- 교면포장 시점과 신축이음부 위치 이격(과업 구간외 53m)으로 시공이음 발생 및 추가 포장 구간은 망상균열 등 노후화되어 있음. 추가공사에 따른 절대공기 부족 등으로 공사기간 연장 및 제반서류등 검토한 바, 적정한 것으로 판단됨.

□ 검토의견 및 처리계획

○ 한남대교(하류교) 교면포장 계약구간은 P10~P15(L=307m, B≒22, A≒66a)이나, 신축이음구간(1구간 : P9~P13, 2구간 : P13~P15)내에 포장이 마무리되어, 시공이음 발생 및 신·구 포장간 파손이 우려되어 신축이음까지 연장포장(53m)이 필요한 사항임.

○ 추가 포장구간은 계약된 공사구간과 같이 노후, 망상균열 등이 심화되고 있으며, 연접한 구간 미정비시 포트홀 및 과속(편도 6차선) 등 복합적인 상황에 의해 교통장애 및 중대재해예방을 위해 사전정비가 필요하다고 사료됨.

○ 추가공사에 따른 증가된 공사비(≒111백만원)는 총사업비(낙찰차, 계약심사절감액 등) 이내에 시공이 가능하며, 감리단에서 검토한 실정보고 내용이 타당하다고 사료되어 승인 하고자 함.

○ 책임건설사업관리기술인에게 실정보고 승인 내용을 통보하여 시행토록 하고, 신속한 추진을 위해 우선 시행한 후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

□ 향후계획

○ ‘22. 11. : 설계변경(도급액 10% 이상 증액에 따른 설계변경심의 포함)

○ ‘22. 11. : 공사준공

붙 임 : 1. 건설사업관리자 실정보고서 1부.   끝.