아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(새로운 광화문광장 조성사업-잔디보호매트)

1. 방재시설부-22506(2022.05.17.)호 및 23710(2022.06.15.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 『새로운 광화문광장 조성사업(역사광장 및 사직로 선형변경공사)』 에 소요되는 관급자재(잔디보호매트)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

▢ 납품기한 연기 요청 내역

납품요구번호	품명	납품기한		납품업체
		당초	변경
12-22-1-53450-01	잔디보호매트 (500×500×31㎜)	2022. 10. 09.	2023. 6. 30.	키그린(주)

▢ 변경사유: 문화재 발굴조사에 따라 공사기한이 2023.6.30.까지 연장됨에 따라

공사준공일까지 납품기한을 연장하고자 함.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	김현곤		공원시설과장	이병호		방재시설부장	10/05
이동훈
협조자	주무관	신경환		주무관	김규희
시행	방재시설부-28372	(	2022.10.05	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8683	/전송	02-3708-8756	/	milk@seoul.go.kr	/	대시민공개