“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	부진공정 만회대책 제출 요청(2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『**************************』와 관련하여 당초 계획 공정보다 추진 실적이 부진한 실정으로 이에 대한 부진 사유 및 부진공정 만회 대책을 수립하여 2022.10.07.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 상기 공사가 사고이월 되지 않도록 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고원석		시설운영팀장	김진성		시설관리과장	10/05
문병희
협조자
시행	시설관리과-31739	(	2022.10.05	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4892	/전송	02-3146-4939	/	kosword@seoul.go.kr	/	부분공개(6)