문서번호	설비부-29845
결재일자	2022. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		문학준	10/05
			김호성
협조

『제2자유로 입체화 기계설비공사』공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연기 검토

『제2자유로 입체화 기계설비공사』

공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연기 검토

2022.  10. 04. (화)

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 입체화 기계설비공사』

공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장 검토

□ 사업개요

ㅇ 사업명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 조성공사

ㅇ 위  치 : 서울특별시 마포구 상암동 월드컵경기장 교차로 일대

ㅇ 규  모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로확폭(L=582m)

ㅇ 계약현황

구 분	계약명 (계약번호)	계약상대	계약금액	계약기간
공 사	제2자유로 입체화 기계설비공사 (20211001DFD-00)	**********	132,687천원	'21.10.06. ~'22.10.31.
관급자재	수중펌프 구매 (12222041500)	*******	111,120천원	'22.05.02. ~'22.10.31.

ㅇ 건설사업관리단 : 천일, 동부엔지니어링, 경동엔지니어링

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장제8절(2.계약기간의 연장)

ㅇ 기계설비공사 공사기간 연장요청 검토보고(제2자유입건 제2022-319호)

□ 검토내용

ㅇ 변경내용 : 계약기간 변경 (금액변경 없음)

구 분	계약명	계약기간
		당 초	변 경
공 사	제2자유로 입체화 기계설비공사	'21.10.06.~'22.10.31.	'21.10.06.~'22.12.30.
관급자재	수중펌프 구매	'22.05.02.~'22.10.31.	'21.10.06.~'22.12.30.

ㅇ 변경사유 : 선행공종(토목)의 공정계획 일정에 따라 공사기간 연장

- 당초) 2019.08.01. ~ 2022.09.30.   변경) 2019.08.01. ~ 2022.12.30.

ㅇ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공종의 공정계획을 고려 공사기간을 연장함이 타당함.

ㅇ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

ㅇ 지체상금 : 미부과

ㅇ 계약금액 : 변동없음

□ 향후계획

ㅇ 건설사업관리단의 검토내용이 적정한 것으로 판단되어,

ㅇ 공사 및 관급자재의 준공(납품)기한 변경계약을 총무부로 의뢰.

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.