문서번호	지식문화과-25923
결재일자	2022. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지식문화과장	서울도서관장
김미란		차영선	10/06
			오지은
협조

서울아트책보고 대형간판 제작 및 설치 계약연장 계획

2022. 10.

서울도서관

(지식문화과)

서울아트책보고

대형간판 제작 및 설치 계약연장 계획

「서울아트책보고 대형간판 제작 및 설치 공사」사업기간 연장을 통해 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 서울아트책보고 대형간판 제작 및 설치

ㅇ 추진기간 : 2022. 8. 12. ~ 10. 6.

ㅇ 계 약 자 : ****************

ㅇ 계약금액 : *****************************

ㅇ 사업내용 : 대형간판 2종 제작 및 설치

- 설치위치 : 서울아트책보고 외부 출입구 및 계단 상단

외부 출입구(정면)	외부 출입구(측면)	계단 상단

□ 계약변경 개요

ㅇ 변경내용 : 계약기간 연장

구분	당초	변경	비고
계약기간	2022. 8. 12. ~ 2022. 10. 6.	2022. 8. 12. ~ 2022. 11. 3.	4주 연장

ㅇ 변경사유

*****************************************************************

***************************************

*****************************

ㅇ 지체보상금 : 미부과

************************************

********************

*****************************

□ 향후계획

ㅇ 계약변경                               : ’22. 10. 6.

ㅇ 설치 및 정산                            : ~ ’22. 11. 3.

붙임  합의각서 1부.  끝.