아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(제2자유로 입체화 기계설비공사 및 수중펌프 구매)

우리 본부에서 추진중인 '제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사'의 기계분야 공사 및 관급자재 구매 건에 대하여 아래와 같이 변경계약(기간연장)을 의뢰합니다.

가. 계약현황

구 분	계약명(계약번호)	계약상대	계약금액(원)	계약기간
공 사	**************** ****************	**********	***********	2021.10.06. ~2022.10.31.
관급자재	******* *************	*********	***********	2022.05.02. ~2022.10.31.

나. 변경내용 : 계약기간 연장 (※계약금액 변동없음)

구 분	계약명	계약기간
		당 초	변 경
공 사	제2자유로 입체화 기계설비공사	2021.10.06.~2022.10.31.	2021.10.06.~2022.12.30.
관급자재	수중펌프 구매	2022.05.02.~2022.10.31.	2022.05.02.~2022.12.30.

다. 변경사유 : 선행공종(토목) 준공기한 연장에 따른 조정 (※지체상금 미부과)

붙임 : 변경계약 검토보고 및 합의각서 각1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	이상록		도로설비과장	代임현철		설비부장	10/06
김호성
협조자
시행	설비부-29963	(	2022.10.06	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 1동 14층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-1608	/전송	02-2133-1003	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(5)