문서번호	기전과-26567
결재일자	2022. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이정호		석대창	10/07
			차창훈
협 조
	주무관			이건용
	주무관			조소현

- 동작지하차도 전기설비 침수피해 긴급 복구 -

발주 계획 보고(변경)

2022. 10.

남부도로사업소

(기전과)

- 동작지하차도 전기설비 침수피해 긴급 복구 - 발주 계획 보고(변경)

2022. 8. 8. 기록적인 폭우로 동작지하차도 및 지하 전기실이 침수로 인한 긴급 복구 계획을 수립하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 근거자료

ㅇ 동작지하차도 침수 상황 보고(기전과-24671, 2022. 8. 12.)

ㅇ 2022년 제9차 재난관리기금 운용심의위원회 심의결과 알림

- 안전총괄과-29738, 2022. 9. 8.

ㅇ 서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

- 제3조(심사 대상 및 범위) 2항

※ 천재지변, 재해복구 등 긴급한 사정으로 선정심사가 불가능한 경우

□ 시설 현황

시 설 명	연장/폭	집수정	수중 펌프	비상 발전기	준 공 일
동작 지하차도	350m/11.5m	378㎥	30HP x 3대	75kW	1984. 11. 13.

□ 사업개요

ㅇ 건 명 : 동작지하차도 전기설비 침수피해 긴급 복구

ㅇ 사업내용

- 전기공사, 동력배전반, 자동제어반, 등기구, CCTV 교체 설치

ㅇ 사업기간: ′22. 10. ~ 12.

ㅇ 총사업비: 470백만원

ㅇ 예산과목

- 재해 및 재난 예방, 재난예방 및 복구, 응급복구(재난관리기금 재난계정), 시설비

ㅇ 교체대상 및 신규 구입

대 상	설치년도	설치현황	비 고
계약전력	1984	72KW	동력 52, 가로등 20
비상발전기	2015	75KW	전력 이중화로 철거
무정전전원설비(UPS)	2019	3KVA	동일사양
자동제어(침수감지 추가)	2016	원격제어	2중화(펌프수위조절)
수배전반(배전반)	2015	2대(저압반)	통합배전반
무감전단자대			3상 50A 9EA
등기구(지하차도)	2020	24등	LED(100W), 간선교체
CCTV	2020	5대(회전식)	1대 방수용
호이스트	2004	1TON, 1대	전기공사 추가
전광판			3,072 x 1,024
엔진양수기		2.5㎥/min	2대 신규 구입

□ [당초] 예산 집행 내역 : 총사업비 469,688천원

구 분	공사명	계약방법/업체	집행 금액(천원)	비고
공사	전기공사	****************	*******	긴급
물품	자동제어	**************	******	긴급
물품	배전반	***	******	30일
물품	무감전단자대	***	*****	30일
물품	등기구	***	******	30일
물품	CCTV	***	******	30일
물품	전광판	***	******	30일
물품	엔진양수기	************	******	30일

□ [변경] 예산 집행 내역 : 총사업비 466,827천원

구 분	공사명	계약방법/업체	집행 금액(천원)	비고
공사	전기공사	***********	*******	긴급
물품	자동제어	***********	******	긴급
물품	침수감지	***********	******	긴급
물품	배전반	***	******	30일
물품	무감전단자대	***	*****	30일
물품	등기구	***	*****	30일
물품	CCTV	***	******	30일
물품	전광판	***	******	30일
물품	엔진양수기	************	******	30일

ㅇ 전기공사 낙찰차액을 사용 전기감리용역 발주(금14,300천원)

- 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령(12. 시설비 및 부대비)

ㅇ 한전인입라인 이중화(한전 공사분)

- 사업기간 : ‘22. 10. ~ 12.

- 전기시설부담금 : *************

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

□ 추진현황

ㅇ 2022. 8. 22. : 재난관리기금 신청 서류 제출

ㅇ 2022. 9. 13. : 재난관리기금 심의 결과 통보

ㅇ 2022. 9. 29. : 일상감사 의뢰

□ 향후 계획

ㅇ 공사발주 및 관급자재 조달구매(′22. 10. ~ 12.)

붙임 : 설계내역서 각 1부.