등록번호

도시재생과-6956

주무관

천연충현도시재생팀장

도시재생과장

도시재생국장

등록일자

2022.10.7.

이지성

주형모

문현우

10/07

염봉선

결재일자

2022.10.7.

공개구분

부분공개(5)

협  조

예산팀장

신해균

주무관

김태윤

주차관리팀장

유선환

주무관

김흥렬

2022 영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성 예산 명시이월 계획

서 대 문 구

도시재생과

2022 영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성 예산 명시이월 계획

2022년 특별조정교부금의 연내 예산집행이 불가능하여 내년도 명시이월하여 독립문 문화공원 지하주차장 건립공사 추진 및 공사비 집행에 만전을 기하고자 함

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성사업

○ 대 상 지 : 영천동 263번지 일대

○ 대지면적 : 5,407.20㎡

○ 사업기간 : 2019년~ 2023년

○ 사업내용 : 지하공영주차장 조성, 교통정보센터 신축, 문화공원 리모델링

○ 총사업비 : ********************************

□ 추진 경위

○ 2019. 05. : 중기부 주차환경개선사업 선정(78억 10월 교부)

○ 2020. 01. : 독립문 문화공원 지하주차장 기본 및 실시설계 용역 시행

○ 2020. 09. : 중기부 주차환경개선사업비 간주처리(78억 추가 교부)

○ 2020. 12. : 서울시 설계경제성(VE) 심의 통과

○ 2020. 12. : 현상변경 허가 문화재청 문화재위원회 심의 조건부 통과

○ 2021. 04. : 서울특별시 건설기술심의(시 기술심사담당관) 통과

○ 2021. 06. : 독립문 교통정보센터 신축이전 공사 우선 발주

○ 2021. 07. : 소규모 지하안전영향평가 협의 최종 통과

○ 2021. 09. : 독립문 문화공원 시유지 사용 시-구 최종 협약 체결

○ 2021. 09. : 독립문 문화공원 지하매설물 이설 유관기관 협의

○ 2021. 10. : 독립문 문화공원 지하매설물 이설 공사(상·하수도 일부)

○ 2021. 10. : 서울특별시 계약심사 및 일상감사 통과

○ 2021. 11. : 구 계약심의위원회 통과

○ 2021. 11. : 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 입찰공고

○ 2021. 12. : 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 계약

○ 2022. 03. : 독립문 교통정보센터 임시 이전(독립문 방문자센터 내)

○ 2022. 09. : 독립문 문화공원 문화재 시굴 및 표본조사 부분완료

□ 명시이월 사유

○ ***************************************************************************************************************************

□ 명시이월 내역

○ ************************************

(단위 : 원)

세부사업	통계목	재원	2022예산현액				이월액
			계	본예산 (간주예정)	2021 명시이월액	2021 사고이월액	명시이월	사고이월 (12월예정)
영천시장 (독립문 어린이공원) 지하주차장 조성	계		16,579,102,530	5,260,000,000	4,620,000,000	6,699,102,530	5,260,000,000	4,620,000,000
	시설비	계	15,227,406,730		4,620,000,000	6,047,406,730		4,620,000,000
		기금 보조금	3,570,438,230		0	3,570,438,230		0
		시비	2,154,368,500		0	2,154,368,500		0
		특별 교부금	9,180,000,000	4,560,000,000	4,620,000,000	0	4,560,000,000	4,620,000,000
		구비	322,600,000		0	322,600,000		0
	감리비	계	1,333,600,000		0	633,600,000		0
		특별 교부금	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	0
		구비	633,600,000		0	633,600,000		0
	시설 부대비	계	18,095,800		0	18,095,800		0
		구비	18,095,800		0	18,095,800		0

○ 명시이월 사유 : 주차장 건립공사 착공 전 사업부지 내 지장물 이설이 지연되어, 올해 집행이 어려운 예산을 명시이월 함으로써 사업 추진에 만전을 기하고자 함

□ 향후계획

○ 2022. 11. : 간주처리

○ 2023. 04. : 교통센터 준공

○ 2023. 12. : 지하주차장 준공

붙임  명시이월사업조서 1부.  끝.