문서번호	설비부-30108
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강재원	김현기	10/11
		김호성

「서울 어울림체육센터 건립 소방공사」 관급자재 납품기한 연장 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설  비  부)

「서울 어울림체육센터 건립 소방공사」

관급자재 납품기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는「서울 어울림체육센터 건립 소방공사」   관급자재(고무발포단열재) 납품기한 연장에 대하여 검토보고 드림

1. 공사개요

ㅇ 공사명 : 서울 어울림체육센터 건립 소방공사

ㅇ 위  치 : 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규  모 : 지하2층/지상3층, 연면적 14,779.98m2

ㅇ 기  간 : 총차 '22.8.25.~'25.6.1.(1차 '22.8.25. ~'23.8.24.)

ㅇ 공사비 : 총차 금1,654,540,000원(1차 금5,000,000원)

ㅇ 시공사 : 마성전설 주식회사

ㅇ 감리사 : (주)토문엔지니어링건축사사무소 외 2개사

2. 관련근거

ㅇ 물품구매(제조)계약일반조건 제25조

ㅇ 관급자재 납품기한연장 요청(어울림 제2210-002호, '22.10.4.)

3. 검토내용

ㅇ 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	품명	계약자	계약금액(원)	납품기한
************************************	*******	*******	**********	**********

ㅇ 납품기한 연장사유

- 고무발포단열재는 배관의 마감에 사용되는 자재로 현재 착공전의 시기임을 고려하여 예정공정표 진도에 근거하여 마감공사 시기인 2025년 4월 30일로 연장을 요청함

ㅇ 변경내용

계약번호 (납품요구번호)	품명	납품기한
		당초	변경
************************************	*******	**********	**********

ㅇ 건설사업관리기술자 검토의견

- 서울 어울림체육센터 건립공사 소방공사 관급자재 고무발포단열재 구매의 납품기한 연장 요청을 검토한 결과, 계약금액 변경없이 실 준공기한에 맞추어 납품기한 연장을 요청함이 적정함

4. 조치계획

ㅇ 건설사업관리단의 의견이 타당하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)로 납품기한 연장 요청하고자 함

붙임 :  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.