문서번호	토목부-31902
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	10/11
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 -

공사 추진계획 보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 -

공사 추진계획 보고

'22년 수방기간(`22.05.15~`22.10.15) 이후 『창동 상계 동서간 연결교량 건설공사』공사 추진계획을 보고 드림

1		근 거

○ 보행교 장기2차 공사발주서 검토보고 - 창동상계 제22-183호(`22. 09. 22.)

2		공 사 개 요

□ 보 행 교

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.02.)

○ 도 급 비 :  *************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

○ 공정률(`22.09월 현재) : ********************************

□ 보차도교

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.11.22.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

○ 공정률(`22.09월 현재) : ******************************

3		추 진 현 황

□ 보 행 교

○ '21. 04.          : 1차공사 착공(착공일‘22.04.19, 준공일’22.12.02)

○ '21. 11.~`22. 05  : 1차공사 추진

○ '22. 09. 현재     : 강교제작 하도급 계약 및 강교 제작 중

□ 보차도교

○ '21. 04.       : 1차공사 착공(착공일‘22.04.19, 준공일’22.11.22)

○ '21. 11.~`22. 05	: 1차공사 추진

○ '22. 09. 현재     : 램프교 강교제작 하도급 계약(본교 강교제작 하도급 협의 중)

※ 1차공사 주요공종 추진 사항

· 보차도교(39%) : 교각 및 교대 기초 강관pile+시트pile, A2 가시설(H-pile+토류벽), P1/P2 교각

기둥 설치 , 임시우회도로 설치 및 철거, 기타 부대공 등

· 보 행 교(32%) : 시점부 교각기초 설치( 강관pile+시트pile), 강교제작, 임시우회도로 설치

및 철거, 기타 부대공 등

· 수방기간 하천내 공사중지(`22.05.15.~`22.10.15.)

□ `22년 예산집행 현황

○ '22년 사업비(시설비) : ***************************

○ '22년 지출현황(시설비) : ************************

(단위 : 백만원)

구 분	2022년					비 고
	배정액	원인행위액	지출액	지출잔액	지출품의 가능액
*	******	*****	*****	*****	*****
**** ***********	*****	*****	*****	*****	*
***** ***********	*****	*****	*****	*****	*****

※예산과목 : 균형발전본부 동북권사업과, 도시경제기반형 활성화계획 추진,

도시재생 계획수립(도시개발), 창동상계 동서간 연결교량 건설사업,

시설비 및 부대비, 시설비

4		공사 추진계획

◇ '22년 지출품의가능액(2,775백만원) 범위내에서 보행교 2차공사 계약추진

- 보행교 2차공사 계약금액 : 2,129백만원(지출품의 잔액 : 656백만원)

◇ 지출품의 잔액, 관급자재, 재경비 정산 잔액 등을 활용하여 보행교·

보차도교 1차공사 설계변경 및 준공

◇ 보차도교 건설공사는 '23년도 예산확보 후 2차공사 계약 추진

□ 보행교 2차공사 추진계획

○ 예산집행계획(안)

(단위: 백만원)

**	**	***	******	***	**
****	******	*****	*****	*****
***	******	*****	*****	*****
*****	*****	***	*	*****
******	**	**	*
****	********** * **********	********** * **********	******* * *******

○ 주요공종 추진계획(안)

***	***	***	***	******	***	**
**	*****	******	******
****	********	*******	*******
	*******	***			***
***	*******	*******	*****	*******	*******
	******	*******	*******	*******
****	*****	***	***
***	*******	******			******
	****	****			****
	****	***		***
	****	******		******
	****	******			******
	******	****	****
	*****	*******	*******
	******	**	**

○ 2차공사 추진계획(안)

*****		*******	****	***
*****			*********
*****				****
*******		************		****
******	*****	***********	*******
	*********	****************	******
	****	******************	******
	*****	************	******
	*********	*********	***
	******		*******
******		******		****
*****	****	***********************	*******
	****	*************************************	******
	*******	***********	******
	****	*********	******
	******		*******
*******			*********
***			*******
*******		***********	******
**********			*******

□ 보차도교 추진계획

○ 교각(P1) 기초부와 유지용수관(관리주체 : 중랑물재생센터) 저촉에 따른 기초

위치변경과 경간장 조정에 따른 상부구조 변경설계를 추진하고 현재 감리사,

시공사에서 변경 설계도서를 검토 중에 있으며

○ 변경설계 및 강재값 인상 등으로 본교 강교제작 및 설치 하도급 협의가 지연 되어 `'22년 중 강교제작이 어려울 것으로 판단됨

○ 따라서, 보차도교 2차 공사는 상부공 변경설계에 따른 설계도서 확정 후 '23년

예산을 활용하여 추진 하고자 함 ※'23년 예산(안) 128억원(시설비+감리비)

○ 예산집행계획(안)

(단위: 백만원)

**	**	********	********	***	**
****	******	*****	*****	*****
***	******	*****	*****	*****
*****	*****	***	***	***
******	*	*	*	*
****	********** * **********	********** * **********	******* * *******

○ 2차공사 추진계획(안)

(단위: 백천원)

*****		******	****	***
*****			*********
* * * *	***	**************	********	*
	****	*****	********	*
		******	********	*
	***	****	**********	*
		*********	********	*
	****	*******	********	*
	***	*************	********	*
***		*	**********	*
*** ****	****	*****	*******	*
	***	**********	********	*
*** ****	****	*****	*******	*
	***	**********	********	*
*** ****	****	*****	*******	*
	***	**********	*******	*
***		*	**********	*
*******		*	**********	*
***		*	**********	*
*******		*****	*******	*
**********		*	********	*
****		*	**********	*
*****		*	********	*

5		향 후 계 획

○  '22. 10.  보행교 2차공사 계약

○  '22. 11.  보행교, 보차도교 총차 및 1차공사 설계변경

○  '22. 12.  보행교, 보차도교 1차공사 준공

○  '23. 01.  보차도교 2차공사 계약

○  '23년 상반기  보행교 상부구조 시공

○  '23년 하반기  보차도교 상부구조 시공

붙 임 : 건설사업관리단 보행교 장기2차 공사발주 검토보고서 1부. 끝.