아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	2022년 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역 계약 변경 의뢰

1. 보행자전거과-1958(2022.9.29)호와 관련입니다.

2. 우리부서의 "잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 관리용역"과 관련하여 아래와 같이 계약변경(증액)하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 관리용역

- 용 역 사 : 조은통상(대표자 윤순노)

- 계약기간 : '22.8.25 ~10.24

- 계약금액 : 금53,250,000원(금오천삼백이십오만원)

나. 변경내용

- 계약금액 변경

(단위 : 원)

구분	변경내용		비고(증액)
	당초	변경
계약 금액	53,250,000	**********	*********

- 증액사유

·당초 잠수교 차 없는 다리 시범운영 교통통제(안전)시설 설치 및 관리를 위해 '22.8.28(일), '22.9.4(일) 양일간 2회 기준으로 계약을 체결했으나,

·축제 주관 한강사업본부에서 '22.9.4(일) 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제를 태풍(한남노)으로 인해 취소하고 '22.9.18(일)로 연기한 바 교통통제 안내 현수막 및 입간판 철거·재설치에 따른 추가 비용이 발생함

- 귀책사유 : 서울시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 품의번호 : 415

붙 임 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경산출내역서 1부.  끝.

	보행자전거과장
주무관	박성훈		보행자전거정책팀장	최미숙		보행자전거과장	10/11
오세우
협조자
시행	보행자전거과-2420	(	2022.10.11	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 6층 보행자전거과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2416	/전송	02-2133-1057	/	freetour98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)