문서번호	원수관리과-21562
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이승수		노지문	10/12
			어용선
협조

설계변경 시행보고

(강북취수장 염소 가압수펌프 전기설비 공사)

2022. 10.

강북아리수정수센터

〔원수관리과〕

설계변경 시행보고

(취수장 염소 가압수펌프 전기공사)

우리 센터 취수장 염소 가압수펌프 전기설비 공사 사업과 관련하여 설계변경 사유가 아래와 같이 발생 되어 설계변경을 시행하고자 보고드림.

사업의 개요

□ 사 업 명 : 취수장 염소 가압수펌프 전기설비 공사

□ 계약금액 : 금15,361,100원(금일천오백삼십육만일천일백원)

□ 계약일자 : 2022. 9. 06.

□ 착공일자 : 2022. 9. 13.

□ 준공기한 : 2022.11. 07.

□ 계 약 자 : ㈜남일산전, 대표자 : 장효익(경기도 광명시 하안로288번)

□ 사업내용

○ 구의,뚝도계열 염소 가압수펌프 각 2대 설치

설계변경 계획(안)

□ 설계변경 내역(총괄)

(단위:원)

계약금액(변경전)	변경금액(변경후)	감액금액	비고
15,361,100	14,858,430	-502,670	정산

□ 변경내용 : 보험료 정산

○ 산재,고용 보험료 정산

□ 설계변경 세부내역

(단위:원)

구분	금액		증 · 감	비고
	당초	변경
재료비	2,913,431	2,913,431	0
노무비	9,702,174	9,702,174	0
산재보험료	358,980	0	-358,980
고용보험료	97,991	0	-97,991
기계경비	257,419	257,419	0
기타경비	634,641	634,641	0
공급가액	13,964,636	13,507,665	-456,971
부가가치세	1,396,464	1,350,765	-45,699
총 계	15,361,100	14,858,430	-502,670

조치계획

□  설계변경 계획(안)에 대해 자체 설계변경 심의위원회 개최

□  설계변경 심의위원회 결과에 따라 설계변경 시행

붙 임  1. 합의서 1부.

2. 정산 내역서 1부.  끝.