아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통신호기 원인자부담 공사기간 연장 요청(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

1. 서부도로사업소 기전과-1644(2022. 2. 18.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』교통신호기 원인자공사 승인 받은 사항에 대하여, 공사기간이 연장되어 변경 승인 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사

나. 공사위치 : 마포구 월드컵경기장 사거리 일대

다. 공사기간

당 초	변 경	사 유
2019. 12. 26. ~ 2022. 10. 14.	2019. 12. 26. ~ 2022. 12. 31.	선행공종(토목) 공사기간 연장

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박근형		도로설비과장	문학준		설비부장	10/12
김호성
협조자
시행	설비부-30218	(	2022.10.12	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	2014012315@seoul.go.kr	/	대시민공개