더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가) 설계변경(2회) 시행

우리구에서 시행중인『2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)

2. 공사기간 : 2022. 3. 24. ~ 2022. 12. 31.

3. 계약금액 : 금638,600,000원(금육억삼천팔백육십만원)

4. 계약상대자 : ㈜천일건설 대표 황기진

5. 설계변경 사유 : 추경예산 사업 반영으로 인한 시공물량 증·감 발생

6. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
총사업비	1,244,694,970	2,053,967,970	증	809,273,000
도 급 비	638,600,000	1,109,688,000	증	471,088,000
관 급 비	482,351,100	709,624,500	증	227,273,400
이 전 비	123,743,870	234,655,470	증	110,911,600

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 도로시설물 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.

4 설계변경 검토보고 1부.  끝.

★주무관							한상오				도로시설담당					이태기					도로과장					송승익					건설교통국장						10/12 김석우
협조자				계약담당							신정경					재무과장							강은주
시행			도로과-16950										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3563							/전송			02-2241-6561					/	hso1983@sb.go.kr													/	부분공개(5)