문서번호	치수과-16457
결재일자	2022.10.12.
공개여부	부분공개(5)

주무관	하수담당	치수과장	건설교통국장
장성호	김정훈	김윤기	10/12 김석우
협 조

- 2022년 관내 하수도 준설 및 세정공사(연간단가) - 설계변경(제3회) 검토 보고

2022. 10.

건 설 교 통 국

(치    수    과)

- 2022년 관내 하수도 준설 및 세정공사(연간단가) -

설계변경(제3회) 검토 보고

우리 구에서 시행 중인「2022년 관내 하수도 준설 및 세정공사」와 관련하여 추경예산 확보 등으로 인한 준설물량 증·감 사항 반영을 위한 설계변경(제3회) 검토 보고임

Ⅰ	공 사 개 요

⵨ 공 사 명 : 2022년 관내 하수도 준설 및 세정공사(연간단가)

⵨ 공사기간 : 2022.03.16. ~ 2022.12.31.

⵨ 도 급 비 : 금1,170,249,460원

⵨ 도 급 자 : 예림이앤지㈜ 대표 윤여훈

Ⅱ	추 진 경 과

⵨ 2022. 02. 08.  : 공사 발주

⵨ 2022. 03. 16.  : 공사 계약 및 착공

⵨ 2022. 05. 30.  : 설계변경(제1회) 시행

⵨ 2022. 06. 09.  : 기성준공(제1회)

⵨ 2022. 08. 17.  : 설계변경(제2회) 시행

⵨ 2022. 08. 25.  : 기성준공(제2회)

Ⅲ	보 고 내 용

⵨ 추경예산(300백만원) 확보에 따른 준설 물량 증가

⵨ 특별조정교부금(100백만원) 교부에 따른 준설 물량 증가

⵨ 기타 현장여건 변경에 따른 준설 물량 증․감

⵨ 주요 물량 증·감 변경내역

공 종	규 격	단위	물량 변경사항				비고
			당초	변경	증감현황
					증	감
바켓준설		㎥	529	632	103	-
흡입준설	13톤,25톤	㎥	87	87	-	-
암거준설	인력,25톤	㎥	417	959	542	-
하수관로 세정	13톤, 25톤	m	43,085	57,615	14,530	-

Ⅳ	조 치 계 획

⵨ 상기와 같은 실정으로 본 공사의 설계변경(제3회)을 아래와 같이 시행코자 함

⵨ 설계변경(제3회) 내역

[단위 : 원]

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	1,320,249,460	1,720,249,460	증	400,000,000
도 급 비	1,170,249,460	1,570,249,460	증	400,000,000
이 전 비	150,000,000	150,000,000		-

⵨ 예산과목

○ 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하수도 유지관리, 시설비및부대비, 시설비       (구비–1,370,249,460원)

○ 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비                                           (시비- 350,000,000원)

붙임  1. 설계변경 사유서(제3회). 1부.

2. 설계변경(제3회) 내역서 1부.

3. 방침서 각 1부.  끝.