문서번호	급수운영과-32550
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		김용만	10/13
			김원수
협 조

홍은배수지 1호지 내부 방수 ․ 방식공사 하자보수 작업계획

2022. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

홍은배수지 1호지 내부 방수 ․ 방식공사 하자보수 작업계획

급수운영과장 : 김원수☎3146-3640 급수운영팀장 : 김용만☎3680 담당 : 김기문☎3641

2016년 시행 된『홍은배수지 1호지 내부 방수·방식공사』에 대해 '22. 5. 2. 시공사와 현장 합동조사 시 확인된 하자물량에 대해 작업계획을 보고 드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은배수지 1지 내부 방수 · 방식공사

○ 공사기간 : 2016.09.09. ~ 2016.12.29.[하자기간 : 2023.12.28까지]

○ 최종정산금액 : ************

○ 도 급 사 : *************

- 패널방식 ***************************************

- 도막방식 ****************************************

□ 하자조사 내용

○ 조사 대상 : 홍은배수지 1호지

○ 조사 기간 : 2022. 5. 2.(월), 10:00 ~ 14:00

○ 하자검사 결과

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** *******	**	******	*****	**	*****	****
	*****	******	*****	**	*****	****
*** *********	***** *******	****	******	**	******	****

□ 하자보수 계획 (※ 세부내용 붙임 계획서 참조)

○ 하자보수 작업기간 : 2022.10.24.~ 2022.11.2.

○ 세부 일정

- 2022.10.20. : 홍은배수지 1호지 항 비우기

- 2022.10.24. ~ 11.02. : 방수 · 방식공사 하자 보수 시행

- 2022.11.10. : 홍은배수지 1호지 항 청소 시행 및 채우기

○ 하자보수 내용

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** *******	**	******	*****	**	*****	****

□ 조치 계획

○ 2022년 하반기 항청소 전 하자 보수작업을 완료하여 맑은물 공급에 차질이

없도록 추진

○ 하자보수 작업 이후 현장점검 및 보수현황을 본부 시설관리과에 제출

붙   임  하자보수 작업 계획서 1부.  끝.