문서번호	토목부-32087
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		김동현	10/13
			하현석
협조
	주무관		박희정

- 양재대로 구조개선사업 -

사토장 변경 검토보고

2022.10.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 양재대로 구조개선사업 -

사토장 변경 검토보고

『양재대로 구조개선사업』 대모지하차도 건설공사중 실정보고(사토장 변경)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

※ 동기강 2022-281(2022.10.5.) : 대모지하차도 광역상수도 이설공사 사토장 변경 승인요청

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 양재대로 구조개선사업

○ 규    모 : 대모지하차도 건설 양방향 4차로(B=20.0~27.5m, L=1,174km)

○ 사업기간 : 2018.07.01. ~ 2024.12.31.

○ 도 급 액 : 1,940억원

○ 감 리 단 : 동명기술공단(주)

○ 시 공 사 : ㈜롯데건설외 1개사

Ⅱ		보 고 내 용

○ 당초 선정된 사토장(수도권매립지) 반출불가 사토장 변경 필요

- 대모지하차도 광역상수도 이설구간 터파기 반출 토사의 품질시험 결과 토사반입기준 부적합으로 판정되어 사토장을 변경코자 함.

************************************

└***********************************************

○ 사토장 운반거리 및 단가검토

구 분	***	***	****
	*****************	**********************
운반거리(㎞)	****	*****
운반단가(원)	******	******
단가적용시기	********	********	*******

○ 공사비 증·감 현황

구 분	******************			**
	***	***	*****
직 접 공 사 비	*******	*******	******
간 접 공 사 비	******	******	********
공 급 가 액	*******	*******	*******
부 가 가 치 세	******	******	*****
도 급 공 사 비	394,000	387,000	- 7,000

○ 책임건설사업관리기술인 검토의견

- 상기와 같이 시공사에서 제출한 사토장 변경 보고를 검토한 결과 적정하다고 판단되며,

- 추후 토석정보 공유시스템 인근현장 등을 지속적으로 조사하여 경제적인 사토반출이 추진될 수 있도록 만전을 기하고자 함.

Ⅲ		조 치 의 견

○ 책임건설사업관리기술인 검토의견과 같이 사토장 변경 선정이 적정하다고 판단되므로 대모지하차도 건설공사중 발생되는 토사에 대하여 반출을 승인하고자 함.

붙임: 사토장 검토보고 공문 1부.  끝.