문서번호	친환경건물과-2253
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	10/13
			서은경
협조

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 전기공사

설 계 변 경  검 토 보 고

2022. 10.

기후환경본부

(친환경건물과)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 전기공사

설 계 변 경  검 토 보 고

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 전기공사와 관련하여 기 승인한 실정보고 사항(승인일:2022.8.12.)에 대해 시공자로부터 설계변경 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고합니다.

□ 공사개요

가. 공 사 명 : 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 전기공사

나. 공사기간 : '22.3.4. ~ 12.15.

***********************

라. 시 공 자 : (주)세광전력 대표자 박세규

마. 감 리 자 : (주)극동파워테크 대표자 배철한

□ 관련근거

가. 시공자 실정보고서 : 세광20*******01(2022.08.09.)호

나. 감리원 실정보고 기술검토서 : 극동(감리) 2022-0810(2022.08.10.)호

다. 실정보고 검토보고 : 기후변화대응과-26574(2022.08.11.)호

라. 실정보고 승인통보 : 기후변화대응과-26583(2022.08.12.)호

마. 시공자 설계변경 요청서 : 세광20*******01(2022.10.06.)호

바. 감리원 설계변경 기술검토서 : 극동(감리) 2022-1006(2022.10.06.)호

□ 설계변경 사항

가. 설계변경 주요내용

- 전기 인입용량 증가(155KW→499KW)에 따른 인입설비 및 전력간선설비 물량변경

- 분전반 위치변경 및 용량증가에 따른 배관 및 배선 물량변경

- 냉난방기 추가 및 실외기 위치변경에 따른 배관 및 배선 물량변경

- 분전반 위치변경 및 조명기구 변경 등에 따른 배관 및 배선 물량변경

- 옥외보안등 접지선 물량변경 등

나. 설계변경 검토내용

구 분	설계변경 내용(사유)	도급공사 증·감(원)	비고
저압인입 설비공사	************************************* ******************************* ************************************* *********************************************************	***********
전력간선 설비공사	**************************************** ********************************************************************************	************
냉난방 설비공사	***************************************** *****************************	*********
전등설비공사	*************************** **************************************	***********
옥외보안등 설비공사	*********************	*********
전열공사	***************************	*********
소 계		************
제경비 및 부가가치세		************
합 계		************

******************************

******

********************************************************************************************

라. 단가적용 기준

❍ 관련 규정

▸관련근거 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정)

① 신규단가(계약단가×) : 설계변경 시점 산정한 단가에 낙찰율(88.535%) 적용

② 계약단가(○) : 기존 계약단가 적용

□ 보고자 처리의견

시공자 및 감리자가 제출한 설계변경 자료를 검토한 결과 기 실정보고 승인한 사항을 적정하게 반영하였다고 판단되므로 설계변경 처리하고자 함.

붙임  1. 시공사 설계변경 요청서 1부.

2. 감리 기술검토 의견서 1부.

3. 설계변경내역서(산출서 포함) 1부.

4. 계약금액 검증확인서 1부.

5. 변경 전·후 도면 1부(별도첨부).  끝.