아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	설계변경 시행(취수장 염소 가압수펌프 전기설비 공사)

우리 센터 "취수장 염소 가압수펌프 전기설비 공사" 사업 건과 관련하여 설계변경 심의 위원회 개최 결과에 의거 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 취수장 염소 가압수펌프 전기설비 공사

나. 계 약 자 : (주)남일산전, 대표 장효익

다. 계약기간 : 2022. 9. 7. ~ 2022. 11. 7.

라. 계약금액

(단위:원)

계약금액(변경전)	변경금액(변경후)	감액금액	비고
15,361,100	14,858,430	- 502,670	정산

마. 예산과목 : 상수도사업비용,원수 및 취수비,기계장치,시설비 및 부대비,시설비

바. 설계변경 사유 : 보험료 정산

붙임  1. 설계변경 시행보고서  1부.

2. 설계변경 심의 의견서 1부.

3. 설계변경심의위원회 개최결과서 1부.

4. 정산 내역서  1부.

5. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	이승수		주무관	류혜영		원수관리과장	노지문		강북아리수정수센터소장	10/13
어용선
협조자	주무관	황여진
시행	원수관리과-21575	(	2022.10.13	)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682(강북통합취수장)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5231	/전송	02-3146-2238	/	tnflqks115@seoul.go.kr	/	부분공개(5)