문서번호	토목부-32079
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장		시설국장
박희정	김동현	하현석		10/13
				권완택
협 조	보행자전거과장		오세우
	주무관		노승환

자전거도로 연결교량 신설관련 대책회의 결과 보고

[청계천~정릉천 자전거도로 연결공사]

2022. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

자전거도로 연결교량 신설관련 대책회의 결과보고

「청계천~정릉천 자전거도로 연결공사」와 관련 사업주관부서의 자전거 연결교량 우선 시행요구에 따른 대책회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

ㅇ 위    치 : 청계천 및 정릉천 합류부(고산자교~신탑철교~중랑천합류부)

ㅇ 규    모 : 자전거도로 교량신설(L=30m, B=5.4m), 자전거도로 신설(L=642m), 자전거도로 정비(L=2,300m)

ㅇ 사업기간 : 2021.12.14.~2022.12.31.

ㅇ 사 업 비 : 2,103백만원(사고이월예산)

ㅇ 시 행 사 : ┌ 주계약자 : 태궁종합건설㈜ (44.27%)

└ 부계약자 : 정석으뜸기술㈜ (55.73%)

ㅇ 감 리 사 : 수성엔지니어링㈜

□ 추진경위

ㅇ ‘21.11.22. : 사업시행요청(자전거정책과 → 토목부)

ㅇ ‘21.12.14. : 공사계약

ㅇ ‘22.04.20. : 중복공사 방지를 위한 관계부서 합동회의(보행자전거과, 동대문구청, 서울시설공단, 치수안전과)

ㅇ ‘22.04.26. : 신설구간 제척 및 예산범위내 사업구간 조정 회신(자전거정책과 → 토목부)

ㅇ ‘22.06.17. : 신설구간 제척 및 예산범위내 사업구간 조정 방침(토목부-25250호)

ㅇ ‘22.08.31. : 연결교량 및 신설도로 우선 시행요청(보행자전거과→토목부)

ㅇ ‘22.09.07. : 연결교량 및 신설도로 시행불가 통보(토목부→보행자전거과)

ㅇ ‘22.09.27. : 사업시행 목적에 맞게 연결교량 우선 시행 재요청(보행자전거과→토목부)

□ 자전거도로 연결교량 신설관련 대책회의 개최 결과

① 대책회의 개최 개요

○ 안  건 : 자전거도로 연결교량 신설관련 대책

○ 일  시 : 2022. 10. 6.(목) 09:30 ~ 10:00

○ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 시설국장실

○ 참석자

************************************

****************************************

**********

**************************************************************

********************************************

***********************************요청

*************

************************************

********************************************

**********************************************************

**************************************************

- *****************************************

**********************************************************************

□ 회의결과 조치계획

○ 설계시행사(㈜동해종합기술공사)에 가시설 설계보완 조치 요청

○ 공사 착수지시(시공사, 감리사)

○ 연결교량 우선시행을 위한 사업계획 변경 및 공정계획 수립토록 건설사업관리자에게 통보

□ 향후 계획

○ 2022. 10. 16.~     : 공사 착공

○ 2022. 10. 20~28   : 설계변경 시행 및 변경계약   끝.