아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		중부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	송현동 열린녹지광장 조성공사 설계변경 시행

우리 소에서 시행 중인 「송현동 열린녹지광장 조성공사」건에 대해 아래와 같이 설계변경을 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 송현동 열린녹지광장 조성공사

2. 위    치 : 송현동 48-9

3. 공사기간 : 2022.07.18. ~ 10.15.

4. 공사내용 : 잔디광장, 야생화 군락지 및 순환형 산책로 조성 등

5. 총공사비 : ***********************

6. 계약상대자 : 원앤티에스 대표 이조원

7. 변경내역

구 분		공 사 비		증 감 액	비고
		당 초	변 경
도급비	공급가액	632,842,909	1,051,818,182	증) 418,975,273
	부 가 세	63,284,291	105,181,818	증) 41,897,527
	소 계	696,127,200	1,157,000,000	증) 460,872,800
관급자재비		52,323,760	419,020,020	증) 366,696,260
총공사비		748,450,960	1,576,020,020	증) 827,569,060

8. 변경사유 : 공정대책회의(총 8회) 및 현장 실정사항 반영 등

9. 예산과목

- 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발(도시개발), 송현동 부지 활용 및 공원화 사업, 시설비및부대비, 시설비

- 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발(도시개발), 토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 검토보고서(별송) 1부

2. 변경내역서 1부

3. 제비율검증확인서 1부

4. 합의각서(별송) 1부.  끝.

	시 설 과 장
주무관	김인표		공원조성팀장	이종무		시설과장	10/13
이정환
협조자	재무팀장	김연호
시행	시설과-754	(	2022.10.13	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 중부공원녹지사업소 4층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3783-5962	/전송	02-3783-5969	/	skyksp1234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)