문서번호	운영과-25481
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		10/13
		오근
협 조
	주무관		김영현

준공기한 연기보고

(자동제어 공사 및 TAB 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10. 13. (목)

서울시립미술관

(운영과)

준공기한 연기보고 (자동제어 공사 및 TAB 용역)

'북서울미술관 공조시스템 개선 공사' 시공사 작업일정에 따른 시운전 일정을 조율하고, 시운전 이후로 연계공정을 계약연장 하고자 함.

□ 연장근거

○ 잔여 작업 일정 제출의 건 [북서울미술관 공조시스템 개선 공사] (서울시설공단 공사감독3처-9216호, 2022.10.13.)

○ 잔여 공정 일정의 건[북서울미술관 공조시스템 개선 공사]

(주식회사 엠제이이엔씨 MJ-HO-2022-011호, 2022.10.11.)

□ 계약개요

○ 공 사 명: 공조시스템 개선관련 자동제어설비 공사

- 금 액: ************************

- 기 간: 2022. 9. 22. ~ 10. 19. (28일)

- 업 체: ********(대표: ***)

- 내 용: 건식제습기 및 자동제어시스템 연결공사

○ 용 역 명: 북서울미술관 전시장 공조설비 TAB 용역

- 금 액: *********************

- 기 간: 2022. 9. 21. ~ 10. 20. (30일)

- 업 체: ****************(대표: ***)

- 내 용: 건식제습기 및 연동설비 측정·평가

□ 추진현황

○ '22. 7. 29. : 제작도면(건식제습기) 승인

○ '22. 8. 29. : 기계공사 1차 실정보고 승인

○ '22. 9. 15. : 전기공사 준공

○ '22. 9. 29. : 제조물품(건식제습기) 현장반입

○ '22. 10.    : 기계공사(배관 및 덕트 공사) 작업중

□ 계약변경

○ 변경사유: '북서울미술관 공조시스템 개선 공사' 잔여 공정표에 따른 통합 시운전 일정('22.10.24.)을 고려하여 준공기한 연장

※ 덕트설치 작업이 10.22.에 마무리되어 다음 휴관일인 10.24.에 시운전하고자 함.

○ 변경내용: 준공기한 변경(계약금액 변동없음)

- 공조시스템 개선관련 자동제어설비 공사: 당초 10.19. → 10.26. (7일연장)

- 북서울미술관 전시장 공조설비 TAB 용역: 당초 10.20. → 10.31. (시운전일로부터 7일 연장)

□ 검토의견

○ 해당 사업은 물품제조·공사 및 용역 등 자격요건에 따른 입찰업체가 포함된 복합공정으로, 장비연결 설치작업이 마무리된 후 통합 시운전 실시 및 준공검사하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 귀책사유: 서울시립미술관

□ 행정사항

○ 계약부서인 총무과에 자동제어 공사 및 TAB 용역 계약 준공연기 의뢰

□ 향후계획

○ 공사 관계자(감리,물품,공사,용역 등) 시운전 일정 통보

붙임  합의각서 2부.  끝.