문서번호	시설과-734
결재일자	2022. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
최규철	하종식	10/14
		김달용

「어린이대공원 팔각당 야외동산 재정비 사업」 준공기한 연기 검토보고

2022. 10.

동부공원여가센터

[ 시   설   과 ]

「어린이대공원 팔각당 야외동산 재정비 사업」

준공기한 연기 검토보고

우리 센터에서 시행 중인「어린이대공원 팔각당 야외동산 재정비 사업」과 관련, 아래와 같은 사유로 준공기한 연장을 검토하여 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 어린이대공원 팔각당 야외동산 재정비 사업

○ 위    치 : 광진구 능동로 216 어린이대공원 잔디축구장

○ 공 사 비 : 337,012천원(도급비 313,918천원, 관급비 23,094천원)

○ 공사내용 : 팔각당 앞 야외동산을 다목적 스탠드로 재조성, 교량하부를

커뮤니티 공간으로 정비

○ 공사기간 : 2022. 7. 4. ~ 10. 31.(120일간)

○ 도 급 사 : (주)단풍나무 대표 김종호

□ 준공기한 연기검토

○ 검토사유 : 준공기한의 연기

○ 연기사유

- 8월 하순 지속적 우천 및 9월 초 태풍 영향으로 기상조건 악화, 공정지연

- 녹지조성에 따른 수종의 선택 및 설계변경 등 소요기간 필요

○ 준공기한 변경

- 당  초 : 2022. 7. 4. ~ 10. 31.

- 변  경 : 2022. 7. 4. ~ 11. 30.(30일 연장)

○ 지체상금 부과여부 : 기상상황에 및 설계변경 등 부득이한 연기사유

발생으로 미부과

□ 조치계획

○ 계약부서에 변경계약(준공기한 연장) 요청하여 공정관리에 만전을 기

하고자 함.