문서번호	시설보수과-25734
결재일자	2022. 10. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	10/14
			김용제
협 조

예비준공검사 실시계획 도림천복개(좌안)보수공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10월

강서도로사업소

(시설보수과)

예비준공검사 실시계획 "도림천복개(좌안)보수공사"

2022년 예산사업으로 시행중인 『도림천복개(좌안)보수공사』에 대한 예비준공검사를 실시하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

예비준공검사 개선대책【기술심사담당관-10127호(2018.6.29.)】

○ 검사대상 : 감독권한대행 등 건설사업관리시행공사

○ 안전관리계획 수립 대상 공사(시특법상 1·2종 시설물 등)

○ 시행시기 : 준공 2개월전

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 도림천복개(좌안)보수공사

시 공 사 : 천보산업개발㈜  대표 안태호

공사기간 : 2022. 07. 25 ~ 2022. 12. 21

주요공종 : 신축이음보수 316.7m, 교면포장 17.1a

도 급 액 : ￦618,800,000원

감독기관 : 서울시설공단 공사감독1처

추진공정 : 90%

Ⅲ		예비준공검사 계획

검사일 : 2022. 10. 14(금) 16:00

검사자 : 시설보수과 김규춘외 1명

서울시설공단 공사감독1처 공사감독, 시공사 현장대리인

검사내용

○ 계약공종 전반에 대한 시공상태 등 하자여부 검사

Ⅳ		향후계획

예비준공검사조서 작성

○ 검사결과 지적사항에 대하여 준공전 완료조치 토록 통보

- 서울시설공단 공사감독 1처

2022. 10월 : 잔여공종 등 현장정리

2022. 11월 : 설계변경 및 준공

따로붙임  예비준공검사조서 1부.  끝.