문서번호	토목부-32189
결재일자	2022. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이동섭		김상익	10/16
			하현석
협조

「녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계」

건설사업관리용역 일시 중지 검토 보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(토목부)

「녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계」

건설사업관리용역 일시 중지 검토 보고

녹번천 복원 사업계획 변경에 따른 추가 행정절차 이행(타당성조사, 재투자심사) 등 효율적인 설계관리를 위한 건설사업관리용역(설계) 일시 중지 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 녹번천 복개철거 및 복원사업 관련 협의(토목부-29315호, ‘22.08.25.)

○ 녹번천 복원 사업계획 변경(치수안전과-3001호, ‘22.10.4.)

- *****************************************

- ******************************

※ 사업계획 변경(총사업비 428억 → 1,205억)에 따른 타당성조사(LIMAC) 및 市 재투자심사 필요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 건설사업관리용역

○ 용역기간 : **********************

○ 계약금액 : ******

○ 계 약 자 : **************

○ 주요 추진경위

- ‘21. 06. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- ‘22. 04. : 건설사업관리(설계감리) 용역 착수

- ‘22. 08. : 녹번천 복원 기본설계(안) 협의(치수안전과)

- ‘22. 10. : 사업계획 변경 및 타당성조사 의뢰

□ 보고내용

○ 녹번천 복원 사업계획 변경으로 *********************타당성조사(LIMAC) 절차 이행이 필요하며,

○ *********************** 재투자심사 대상 사업이므로,

○ *******************************함에 따라, 효율적인 사업추진을 위해 건설사업관리 용역 일시 중지 검토

- 진행중인 설계용역은 ********************************************************************************일시 중지 추진

□ 조치계획

○ 건설사업관리(설계) 용역 일시 중지

- 기    간 : *****************************

- 중지사유 : 타당성조사 등 사전 행정절차 이행 완료 시까지 실시설계 수행이 곤란하여 설계단계 건설사업관리 용역 일시 중지

○ 향후 용역 재개 시 조치사항

- 준공기한 연장 : 잔여일수 포함 실시설계 용역 기간을 추가 반영하여 연장 조치

○ 용역 일시 중지 통보 : 건설사업관리사업자, 총무부

붙 임 : 녹번천 복원 사업계획 변경 방침서 1부.  끝.