문서번호	도로보수과-25458
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
김영봉		엄기영	10/17
			이경우
협조	시설보수과장		김시련
	주무관		정용재

『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

조기 발주 계획

2022. 10.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

조기 발주 계획

『포장도로 긴급복구공사』는 특별시도상 노후로 인한 도로파손 예상구간에 대하여 안전사고 예방 및 시민불편사항 최소화를 위해 연속성 확보가 필요함에 따라 익년도 공사를 연말에 미리 발주하여 도로유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 지방계약법 제23조, 제25조 및 동법 시행령 제76조(회계연도 시작 전의 계약 등), 제79조(단가계약)

- 대상 : 시설물의 보수·복구, 물품의 제조 · 구매 · 수리 · 가공 등

□ 23년도 도로 일상유지보수공사 조기발주 추진 시행 알림(도로관리과-29878,’22.10. 7.)

- *******************************************************

*****************************

Ⅱ		2023년 발주계획

□ 공 사 명: 2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)
□ 공사기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.

□ 소요예산: ***********

- ****************************

- *****************************(터널 및 지하차도 등 낙하물 처리)

(단위: 천원)

총사업비	도 급 비	관급자재비 (아스콘 등)	이전비	비 고
*********	*********	*******	******

□ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발특별회계), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비*************

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발특별회계), 도로함몰예방사업, 시설비 및 부대비, 시설비***********

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로유지 일상관리, 시설비 및 부대비, 시설비***********

- 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설 관리(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척)일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비**********

□ 주요 공정(계획물량)

연번	공 종	규 격	단위	물량	비 고
1	절삭후 아스팔트덧씌우기 포장	t=5~20cm	a	**
2	소 파 보 수	t=5~10cm	a	***
3	공 동 복 구	3.0 ×3.0m	개소	**
4	긴급출동·대기(주·야간)	3인	hr	*****

※ (정비)계획물량은 최근 3년('20년~'22년) 평균 시공물량을 기준으로 산정.

- 절삭후 아스팔트 덧씌우기 포장: 넓은 범위 파손도로, 손상 우려지역 정비(보수)
- 소파보수: 소규모 포장(포트홀 등) 파손구간 정비(보수)
- 공동복구: 공동조사용역 결과 통보분 원인파악 및 보수
- 긴급출동·대기: 야간 취약시간대 도로 응급복구를 통한 도로관리체계 유지

	2022년 포장도로 긴급복구공사 정비실적(‘22.10.7. 기준)
************************************************ *********** **************************** ************************** *************************** ************************** *************************************************

Ⅲ		중점 추진계획

□ 사각지대 중점 정비(보수)

- 도로파손 및 소성변형 등으로 안전사고 위험이 예상되는 구간에 대해 집중정비
- 교통량이 많아 교통처리가 복잡하여 포장작업 추진이 어려운 교차로 구간의     소성변형 및 균열, 평탄성 불량지역
- 이면도로 진입부(나팔구 구간) 평탄성 불량 및 균열구간
- 특별시도와 자치구의 접속부분 노후포장 구간
- 물고임으로 보행자 통행 불편 및 안전사고 위험지역

□ 품질관리 강화로 포장도로 공용기간 증대

- 통행량이 많은 노선에 대한 중규모포장시 1등급 아스콘(WC-3) 사용
- 포장파손 유형별, 두께별 포장방법 및 재질을 달리하여 시공
- 현장여건에 따라 균열, 소성변형, 포트홀 집중발생 구간은 선 하부층 개량 후

표층정비

□ 공동조사 결과에 대한 정비

- 순찰 중 발견한 공동 및 서울시(도로관리과)공동조사용역 결과에 따라 조사된사항에 대하여 공동발생 원인조사 및 굴착복구 완료

□ 긴급출동·대기(주·야간)

- 야간시간대(18시 ~ 익일 09시, 15시간) 전체로 확대 운영

- 당직시 긴급보수 현장 모바일 앱 등 도로 파손 및 도로부속물 손괴, 도로 및 도로 시설물의 낙하물 처리 등 민원발생 접수, 순찰사항에 대해 도로보수 및 안전조치를 통한 도로 유지관리체계 유지

- 긴급출동·대기(주·야간)는 예산규모 및 계약체결 일정에 따라 투입 시행(예정)

- 공사 계약(착수)전까지 공백기간동안 발생하는 각종 민원사항(포트홀, 도로   부속물 손괴, 낙하물 처리 등)에 대해서는 도로사업소 공무직(직영반)을 활용 하여 정비(예정)코자 함.

Ⅳ		입찰방법 및 참가자격, 낙찰자결정기준 검토

□ 입찰방법: 일반경쟁입찰

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조(계약의 방법)

□ 입찰참가자격

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 구비하고, 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의한 전문건설업 중 지반조성․포장공사업(주력 분야 : 포장공사) 등록업체또는 건설업역 상호진출 허용에 따른 종합건설업중 토목공사업(토목건축공사업 허용)이어야 함.

□ ｢건설공사 발주 세부기준｣(국토교통부 고시) 제11조에 따라 발주자는 종합건설사업자가 전문공사 입찰에 참여하거나 전문건설사업자가 종합공사 입찰에 참여  하는 경우 입찰참가 등록마감일까지 해당 공사를 시공하는 업종의 등록기준을 갖추고 이를 시공 중 유지하여야 하며,

□ 동 기준 제12조에 따라 발주자는 종합건설사업자가 전문공사 입찰에 참여하거나 전문건설사업자가 종합공사 입찰에 참여하는 경우 원칙적으로 하도급이 제한되어 해당 공사를 직접 시공해야 함

□ 본 공사는 지역의무 공동도급 대상공사로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자(이하“지역업체”라 함)를  반드시 공동수급업체 구성원으로 하여야 하고 지역업체의 최소지분율은 49% 이상(투찰금액 대비 49%를 의미)이어야 함.

단, 지역업체가 입찰참가 자격요건을 모두 갖춘 경우 단독 입찰가능

□ 공동이행방식의 공동도급이 가능하고 공동수급체 구성원의 수는 대표사 포함 2개사 이내〔계약참여 최소지분 5%이상〕이고 공동수급체대표자는 출자비율 비중이 큰 업체를 우선적으로 선임하여야 함.

□「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 같은 법 시행규칙 제14조의  규정에 따라 자격요건을 구비하고 조달청 입찰참가자격 등록된 업체이여야 하며, 조달청 입찰참가자격 미 등록업체는 조달청 입찰참가자격 등록 규정에 따라 입찰서 제출 마감일 전일까지 등록하여야 합니다.

※ 근거 : 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제7장 공동계약 운영요령 제2절 공동수급체의 구성과 적용범위

□ 낙찰자 결정 기준

□ 본 공사는 적격심사 대상 공사로서「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조,「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장 시설공사 적격심사 세부기준에 따라 적격심사대상자 중 예정가격 이하로서 낙찰하한율(86.745%) 이상 최저가격으로 입찰한 순으로 적격심사 하여 종합평점이 95점 이상을 얻은 자를 낙찰자로 결정하며 95점을 얻지 못하면 차 순위 입찰자를 같은 방식으로 심사결정 합니다.

※ 근거 : 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』 제2장 시설공사 적격심사 세부기준

Ⅴ		기타 행정사항

□ 계약의뢰 전 관련부서 사전검토 의뢰

- (감사담당관)일상감사, (계약심사과) 계약심사, (건설혁신과)전문공사 발주 검토

□ 건설폐기물 운반 및 처리, 노면표시 공사

- 공사중 발생되는 건설폐기물 및 노면표시 복구는 우리 사업소(도로보수과)에서 통합발주 예정인『2023년 폐아스콘 운반 및 처리용역(성동3)』과『2023년 노면표시 유지보수공사(연간단가)』에 포함하여 시행코자 함.

□ 최근 이상기온으로 인한 집중호우 및 폭염등으로 아스팔트 정비물량(포트홀 급증)증가시 예산범위내에서 낙찰차액 등을 최대한 활용하여 포장정비 사업추진

Ⅵ		향후추진 계획

□ 2022.10.~11. : 전문공사 발주사업 검토요청 및 계약심사, 일상감사 의뢰
□ 2022.11. : 계약 의뢰 및 입찰공고, 적격심사
□ 2023. 1. : 계약 및 착공

붙임  1. 설계내역서 1부.
2. 공사설명서(시방서) 1부.
3. 23년도 도로 일상유지보수공사 조기발주 추진 시행 알림 및 예산(안) 각 1부.  끝.